투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 요청(도심권 50+캠퍼스 전기공사)

1. 설비부-5940(2016. 04. 15.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 추진하고 있는『도심권 50+캠퍼스 전기공사』에 따른 관급자재 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내용

○ 관급자재 납품기한 연기

품명	계약자	납품기한		계약금액 (원)	납품요구번호
		변경 전	변경 후
조명기구	파인테크닉스	`16.5.30.	`16.10.27.	525,000	12-16-2-03608-00
	루멘전광			191,400	12-16-2-03606-00

※ 계약금액은 변경 없음

나. 연기사유 : 설치시기 미도래

다. 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙 임    관급자재 납품기한 연기 검토 보고 1부.   끝.

	설비부장
주무관	신정규		녹색성장과장	김창균		설비부장	전결 05/02 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-6914	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개