함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2016년 토목,건축 시설물 유지보수공사)

1.  우리 정수센터에서 시행중인 『2016년 토목,건축 시설물 유지보수공사』를 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 계약업체 : 정윤산업(주) 대표 정우연,오혜옥

다. 공사규모 : 콘크리트균열보수250㎥, 석축보수99.6㎡, 벤치플륨관설치10m,

하수관설치10m, 약품동보수 등487㎡.

라. 계약기간 : 2016.02.29 ~ 2016.11.30

마. 설계변경 금액 내역                                         (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	69,227,150	69,227,150	-

바. 설계변경사유 : 신규공종 및 시공물량 증․감 발생 정산

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.  2. 설계변경 보고서 1부.

3. 설계변경 사유서 1부.  4. 합의서 1부.  끝

주무관	김우승		정수시설과장	이흥수		광암아리수정수센터소장	05/02 차윤기
협조자	주무관	윤충용
시행	정수시설과-3296	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293	/
전화		/전송		/		/	대시민공개