서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	양천주민지원협의체
(경유)
제목	양천자원회수시설 2016년 대정비 변경계획 알림

1. 귀 협의체의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 양천자원회수시설의 원활한 운영 및 유지관리를 위하여 2016년 대정비 변경계획을 아래와 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.

○ 대정비 개요

가. 대정비 기간

- 변경전 : 2016. 5. 27. ~ 7. 5.(40일)

- 변경후 : 2016. 6. 2. ~ 7. 11.(40일)

나. 주요 정비내용 : 2호기 반건식반응탑 및 여과집진기 교체, 공정용 공기압축기 교체 등

다. 세부일정

구 분	일 정		내 용
폐기물 반입중지	5. 30. ∼ 7. 7. (예정)		폐기물 수도권매립지 반입 처리 SH공사 집단에너지사업단 열공급 중단
소각로 운전정지	6. 1. 24:00 (예정)
폐기물 반입시작	7. 8. (예정)
보조버너 점화	1호기	7. 11. 10:00 (예정)
	2호기	7. 12. 10:00 (예정)
폐기물 투입	1호기	7. 11. 16:00 (예정)
	2호기	7. 12. 16:00 (예정)

※ 상기 일정은 정비 기간에 따라 조정될 수 있음.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최영우		자원회수시설팀장	권선조		자원순환과장	05/02 이인근
협조자
시행	자원순환과-6802	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3683	/전송	02-2133-1026	/	ttl0009@seoul.go.kr	/	대시민공개