문서번호	시설보수과-3665
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	05/02 신현태
협조

『오목지하차도 출입구 변경공사 실시설계 용역』

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

오목지하차도 출입구 변경공사 실시설계용역』

준공기한  연기 검토 보고

우리사업소에서 시행하는「오목지하차도출입구변경공사 실시설계용역」은 현재 설계 마무리 단계이나 일부 설계서 재검토사항 발생 및 예산대비 조정이 필요한바 준공기한을 연기하여 용역 추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				용역개요

용 역 명 : 오목지하차도 출입구 변경공사 실시설계 용역

용역기간 : 2016. 03. 31. ~ 2016. 05. 09.

용역금액 : 금4,732,800원

도 급 자 : ㈜천마엔지니어링건축사사무소 대표 선종천

공 정 율 : 95%

Ⅱ				준공기한 연기검토

용역기간 : 2016. 3. 31 ~ 2016. 05. 09.

연기사유

- ‘16.04.29. 용역 최종보고서 검토결과 실시설계 금액이 약 269,000천원으로 제출되어

- 본사업의 기 확보된 예산(63,000천원) 대비 부족에 따라 설계서를 면밀히 검토하여 본사업 소요예산을 확정하고자 함

관련근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제8절 2.

(계약기간의 연장)

지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ				조치의견

상기 보고내용과 같이 준공기한 연기후 업무수행에 철저를

기하고자 함

- 당 초 : 2016. 3. 29 ~ 2016. 05. 09.

- 변 경 : 2016. 3. 29 ~ 2016. 06. 30.

Ⅳ				향후계획

2016.05.02 : 변경계약 의뢰(관리단속과)

2016.05.03 : 변경계약

2016.06.30 : 용역준공(예정)  끝.