문서번호	기전과-4676
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
호정오		전결 05/02 양영민
협조

횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사

실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

서부도로사업소

(기 전 과)

횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사

실정보고사항 검토보고

2016년 횡단보도 확충정비사업의 교통신호기 공사 업무수행 중에 감리업체가 제출한 실정보고에 대하여 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2016년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사 현장실정보고서 제출 건

- 문서번호 ㈜트래픽스 TR-개선-0406(2016.04.29.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2016년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사

○ 공사위치: 중구 세종대로 119 서울시청 옆

○ 공사내용: 신호기(차/보) 신설 1식

○ 계약금액: 29,798,000원

○ 공사기간: 2016.03.24. ∼ 2016.06.30.

○ 계약업체: 대현전력(주) 대표 조금옥

○ 감리업체: ㈜트래픽스 대표 김희수

□ 실정보고 내용

○ 변경예상금액 : 증 5백만원(29백만원 → 34백만원)

○ 세부내역

- 중구청 요청에 따라 굴착을 보도 가장자리로 우회하여 변경시행

- 남대문경찰서 도로공사신고 허가조건에 따라 주간에서 야간으로 굴착시행

- 굴착심도(0.3m 정도) 부족으로 배관을 100mm 2열에서 54mm 2열로        변경시행

- 시인성 확보를 위해 250mm 지주 부착대 11m를 300mm 지주 부착대         13m로 변경설치

※ 붙임 현장실정보고서 참조

□ 조치의견

○ 감리업체 실정보고 내용이 타당하므로 감리업체에 우선 변경하여 작업토록 지시하고 추후 준공보고 시에 정산물량 반영하여 설계변경을 시행하고자 함

붙 임: 감리업체 현장실정보고서 1부.  끝.