문서번호	정수시설과-1679
결재일자	2016.5.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
최양교		윤종민	05/03 최석기
협조
	주무관		곽희영

전기실 소방시설 개량공사 발주계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

전기실 소방시설 개량공사 발주계획

우리 정수장의 전기실 소방시설 개량공사 추진계획에 따른 설계용역이 완료 되었으므로 아래와 같이 현장설치 공사를 발주코자 함

☐ 현황 및 관련 근거

○ 전기실 칸막이 철거에 따른 소화설비 대상면적 증가(47~169㎡ →353㎡)

○ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

- 정수장의 전기실 면적이 300㎡ 이상은 물분무등 소화설비를 설치하여야 함

○ 소방시설 공사업법

- 소방시설공사를 시행할 때는 소방시설 공사업을 등록한 자에게 도급하여야 함

☐ 소방시설 개량공사 발주계획

○ 공사규모

- 하론가스 소화설비 및 자동화재 탐지설비 철거

- 청정약재 소화설비 및 자동화재 탐지설비 신설

○ 발주금액 : 178,160천원

○ 계약방법 : 제한경쟁 입찰

○ 입찰 참가자격 : 소방시설 공사업법 제4조에 의한 소방시설 공사업을 등록한

자로서 주된 사무소의 소재지가 서울시인 업체

○ 하자기간 : 3년(소방시설 공사업법 시행령 제6조 적용)

☐ 추진일정

○ 계약심사 의뢰 : 2016. 5월 초순

○ 계약 입찰공고 : 2016. 5월 중순

○ 계약 및 공사시행 : 2016. 6월 ~ 7월(공사기간 2개월 소요)

※ 공사계약 입찰 공고 기간 중 감리용역 기술심사 및 계약 시행

붙임 : 공사설계서서(내역서 및 도면) 1부.   끝.