문서번호	문화정책과-6186
결재일자	2016.5.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	문화정책팀장	문화정책과장
이덕노	이은주	05/03 박대우

체부동 생활문화센터 조성

통합기획TF팀 구성 회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

문 화 본 부

(문화정책과)

- 체부동 생활문화센터 조성 -

｢체부동교회｣ 통합기획TF 자문결과

서촌에 있는 체부동 성결교회를 매입하여 서울시 미래유산으로 보전하고, 국내 생활오케스트라들의 창작활동과 마을웰컴센터로 조성하고자, 통합기획TF팀을 구성, 건물의 상징성 및 구조․기능․안전 등 종합적인 검토을 위해 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ

자 문 개 요

□ 일    시 : '16. 4. 28 (목) 16:00 ~ 17:00

□ 장    소 : 체부동교회 (1층 사무실)

□ 참 석 자 : 8명 (내부 공무원 2, 외부 전문가 2, 운영업체 1)

- 내부 : 박영동 (도시기반시설본부 건축부 담당자)

- 외부 : 운영업체 : KOAMA(한국생활예술음악인협회)

박제유(서울시 공공건축가), 강필수(우방건설산업 대표)

□ 발 표 자 : 문화정책과

- 발표자료 : 체부동교회 조성(안) 및 운영계획

- 발표형식 : 체부동교회 역사, 개요, 조성내용, 운영계획 발표

□ 주요내용

- 체부동리모델링 목표(설계,공사) 및 운영방식

Ⅱ

자 문 내 용

설계에 대한 사항

▶  설계방식

· 채부동교회는 역사적으로 중요하고 가치가 있으며, 건축학적으로 우수함

창의적인 아이디어가 설계에 반영될  수 있도록 현상공모로 추진바람

▶ 내부시설 리모델링(오케스트라) 방향

· 본당 및 예배당을 오케스트라 연습 및 공연장으로 사용하기 위해 방음은

목재(흡입)방식으로 하는 것이 좋음

· 내부 볼룸을 높여 최대한 층고를 확보(천정을 들어 올려는 방법등)

→ 천장(구조체보강 +단열재시공+콘크리트판설치+징크마감)마감

▶ 한옥과 교회의 연계

· 교회는 신발을 신고 들어가는 것으로 설계하고, 한옥과 교회가 서로 유기적으로 연계(동선)될 수 있도록 (한옥내 카폐 “음악이 있는 카폐”)설계반영

→ 한옥은 전면적인 개축 및 대수선공사 방식으로 시행

공사기간연장 및 공사비 증액

▶ 공사기간 : 연장필요

· 문화정책과 의견은 ‘17. 2월 완공예정으로 되있는데

지명(현상공모) 3개월, 본 설계(5개월), 공사기간(6개월), 행정절차등

타부서 협력(2개월) 총 16개월정도가 소요됨 (완공예정: ‘17년 8월)

▶ 공사비 : 증액필요

· 내부 방음 및 천정 높이증가(방음), 지장물(전신주,통신주이설)철거,

석면철거비용, 한옥공사비의 약 10%증액(간접비) 등 공사비 증액 필요

○ 기타 사항 : 통합TF팀을 정기적으로 운영이 필요함

ⅲ

기획부서의견

□ 자문결과중 현상공모 미반영 요구

- 체부동 성결교회는 미래유산으로 외형을 최대한 보전하고 내부만

방음 및 리모델링 하는 것으로 현상공모실시는 예산 및 행정력

낭비로  불 필요함.

□ 체부동 성결교회 층고 높이 증가 : 미반영 요구

- 체부동교회는 전문화된 오케스트라 연주가 아니고, 시민들을위한

생활 오케스트라 연습실로 조성하는 것으로 최소한의 리모델링이 필요

- 내부 천정높이 증가는 체부동교회 고정하중 중가로 건물에 영향을

줄 수 있고 또한 공사비 증액으로 인한 예산 확보에도 어려움이 있음

ⅳ

행정사항

□ 자문결과 및 기획부서(문화정책과)의견을 도시기반시설본부 통보

및 체부동 생활문화센터 조성(안) 반영

첨 부 : 외부인원 참석수당 및 참석부 각 1부.  끝.