문서번호	기반시설과-1535
결재일자	2016.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기반시설과장	시설부장
이건용	조운행	박일연	05/03 박상돈

「당산동~샛강 생태공원 간 보행육교 설치 전기공사」

기성검사 결과 보고(1차)

2016. 5.

기반시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

당산동~샛강 생태공원 간 보행육교 설치 전기공사

기성검사 결과 보고(1차)

전기공사와 관련하여 기성금 지급(1차) 요청에 대한 기성검사 결과 보고임.

1. 공사개요

○ 위    치: 영등포구 당산동~샛강 생태공원 간

○ 규    모: 보행육교 폭5m, 연장 139m, 승강기(20인용) 2대

○ 사업기간: ‘15. 08. 04. ~ ’16. 05. 20.

○ 계약금액: 금115,878,840원

○ 시 공 사: 백산전기건설공사

2. 기성검사 보고 내용

○ 기성검사 결과 전체 공사의 49.05%가 기성되었음을 확인함

- 기성검사일: ‘16. 05. 03.

- 기성검사자: 담당(이건용), 현장대리인(문정호)

○ 금회 기성 청구액                                   (단위:원)

도급액	전회 누계	금회	잔액
115,878,840 (100%)	-	56,838,000 (49.05%)	59,040,840 (50.95%)

3. 검토 의견

○ 위와 같이 전기공사에 따른 기성금 지급 요청이 있어 검토한 바,       전체 공사의 49.05%가 기성되었기에 기성금을 지급하고자 함.

붙임: 기성신고서(1회) 1부.  끝.