문서번호	방재시설부-6545
결재일자	2016.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수시설과장	방재시설부장
조동협		代이병환	05/03 임춘근
협 조

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

품질관리활동비 반영 요청에 대한 검토

2016. 5

도시기반시설본부

(방재시설부)

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

품질관리활동비 반영 요청에 대한 검토

건설기술진흥법 제56조(품질관리 비용의 계상 및 집행) 같은법 시행규칙 제53조(품질관리비의 산출 및 사용기준)에 의거 품질관리비가 공사금액에 계상되어야 하나 품질관리비에서 품질시험비는 계상되어 있으나 품질관리활동비가 누락되어 있어 시공사로부터 반영 요청이 있어 검토 보고함

공사개요

○ 위    치 : 관악구 관악로1 서울대학교 내․외 및 주변

○ 규    모 : 빗물저류조 65,000㎥

- 서울대 내(공사완료) : 공대폭포 5,000㎥, 노천강당(버들골) 20,000㎥

- 서울대 정문 앞(공사중) : 40,000㎥

○ 공사기간 : '12. 1. 3 ~ '17. 5.30

○ 도 급 비 : 40,356백만원

○ 시공사 / 사업관리 : 남광토건외 1 / 신명건설기술공사

보고내용

○ 품질관리비 산출 및 사용기준에 의하면 품질관리비는 품질시험비(품질시험에 필요한 비용 등 명기)와 품질관리활동비(품질시험비 외에 품질관리 활동에 필요한 비용)로 구분하여 계상하도록 되어 있음

○ 본 현장은 품질시험에 필요한 비용은 공사금액에 계상되어 있으나 품질관리활동비는 계상되어 있지 않아 시공사에서 공사비 반영을 요청한 실정임.

- 품질관리활동비에 계상할 수 있는 항목

항 목	내 역
1) 품질관리 업무를 수행하는 건설기술자 인건비	시험관리인을 제외한 품질관리자의 인건비 ※ 시험관리인 : 품질관리 업무를 수행하는 건설기술자(초급기술자)
2) 품질관련 문서 작성 및 관리에 관련한 비용	품질관리계획서 또는 품질시험계획서 작성비 - 품질관리자 인건비의 100분의 1
3) 품질관련 교육 훈련비	현장근로자의 품질관련 교육에 드는 교재비용, 초빙강사료 등 - 품질관리자 인건비의 100분의 1
4) 품질검사비	품질시험 결과의 검사에 드는 비용 등 - 품질관리자 인건비의 100분의 1
5) 그 밖의 비용	공사의 특수성을 고려하여 발주자가 인정한 예비 비용 - 품질관리활동비〔1)+2)+3)+4)〕의 100분의 1을 초과할 수 없음

- 품질관리활동비 산출

항 목	내 역
1) 품질관리 업무를 수행하는 건설기술자 인건비	○ 중급품질관리원 1명 109,937원(대한건설협회)×25일(법정공휴일 공제)/월=2,748,425원
2) 품질관련 문서 작성 및 관리에 관련한 비용	○ 2,748,425원 × 1%=27,484원
3) 품질관련 교육 훈련비	○ 정산비용
4) 품질검사비	○ 정산비용
5) 그 밖의 비용	○ (2,748,425+27,484)×1%=27,759원
계	○ (2,748,425+27,484+27,759)×81.579%(낙찰율)=2,287,203원

※ 1~5차 준공분 제외, 6차 및 잔여분에 품질관리활동비 반영

- 2,287,203원 × 19개월 = 43,454,857원

- 43,454,857원 + 27,385,143원(제경비)=70,840,000원

건설사업관리자 검토의견

○ 품질관리비중 품질시험비는 계상되어 있으나 품질관리활동비는 반영되어 있지 않아 관련법에 따라 금회 설계에 반영하는 것은 적정함

보고자 의견

○ 건설사업관리자의 검토의견이 적정하다 판단되어 실정보고사항을 승인처리하고 추후 설계변경시 계약내역에 반영하고자 함

붙임  건설사업관리자 검토보고서 1부.  끝.