함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사변경계약 체결보고[활성탄 흡착지 샘플링펌프외 1건 설치공사]

우리 정수센터 시행중인 공사에 대하여 변경계약을 체결하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 공 사 명 : 활성탄 흡착지 샘플링펌프외 1건 설치공사

나. 계약업체 : 예은건설(주), 대표 송은정

다. 계약변경 내역

1) 준공기한 : 2016.04.04. ~ 2016.05.03(변경 없음)

2) 계약금액

○ 당초 31,698,590원 → 변경 30,305,000원(감1,393,590원)

3) 변경사유

○ 현장여건에 따른 공종별 시공물량 및 최종 준공에 따른 보험료 정산

라. 변경계약일자 : 2016.05.02.

붙임 : 1. 변경계약서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 변경계약 내역서 1부.

4. 공사계약 특수조건 1부.

5. 공사계약 일반조건 1부. 끝.

주무관	윤충용		행정관리팀장	권영철		정수운영과장	정선교		광암아리수정수센터소장	05/03 차윤기
협조자
시행	정수운영과-5595	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293	/
전화	02)3146-5312	/전송	02)3146-5309	/		/	부분공개(6)