문서번호	도시철도토목부-5582
결재일자	2016.5.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
서재원		방영복	05/03 김진팔
협 조
	설비계획과장			代오임석
	시설전기과장			서태창
	건축공사과장			김내환

「지하철 9호선 3단계 918공구 전면책임감리용역」

설계변경 요청에 따른 검토보고(6차5회)

‘16. 05.

서울특별시 도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 전면책임감리용역」

설계변경 요청에 따른 검토보고(6차5회)

『서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 전면책임감리용역』의 (전기)감리원 투입계획 조정에 따른 설계변경 검토 보고임.

※ 관련문서 : 서영 건설관리 제2016-177호(2016.05.02.)

1		용 역 개 요

□ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 전면책임감리용역

□ 공사위치 : 잠실동 아시아선수촌@~삼전동 (구)잠실병원

□ 계약금액 : (총괄) 4,688,590천원, (6차) 737,960천원

□ 도 급 자 : (주)서영엔지니어링 대표이사 박광준

□ 용역기간 : (총괄) 2009.11.18. ~ 2016.12.31.

(6차) 2015.02.12. ~ 2016.05.09.

2		관 련 근 거

○ 입찰안내서(서울지하철9호선 3단계 918공구 건설공사 전면책임감리감리용역)

- 제6장 과업내용서 제1절 감리수행 공통사항 “1항”(설계변경)

○ 용역계약일반조건 제19조 “2항”(계약기간의 연장)

3		변 경 내 용

□ 6차(5회)

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계약금액	737,960	737,960	-	변경 없음
계약기간	‘15.02.12. ~ ‘16.05.09.	‘15.02.12. ~ ‘16.05.11.	증2일	· 건축감리 투입(04.01) · 기계감리 투입(05.02) · 전기감리 투입시기 조정 (05.02 ⇒ 06.01)

※ (전기)감리원 투입시기 조정 : ‘16.05.02. ⇒ ‘16.06.01.

4		변 경 사 유

○ 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 전면책임감리 (6차)용역 감리원 중 (전기)감리원 투입을 상부공사 공정에 맞게 투입시기를 조정함에 따라 감리용역계약 변경사유가 발생되어, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제6절 “1항”(과업내용의 변경), 제7절 “2항”(계약기간의 연장)에 의거 918공구 전면책임감리용역의 6차 용역기간을 조정.

5		검 토 의 견

○ 상기 변경내용과 같이 진행 중인 6차 용역의 (전기)감리원 투입시기 조정(‘16.05.02. ⇒ ‘16.06.01.)에 따라 용역비 증·감없이 계약기간 연장을 시행하고자 함.

○ 변경내용(6차5회)

(단위 : 천원)

구 분	용역금액			용역기간			비고
	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
6차5회	737,960	737,960	변경없음	‘15.02.12~ ’16.05.09	‘15.02.12~ ’16.05.11	증2일

붙 임 : 1. 설계변경요청 공문(6차5회) 1부.

2. 변경내역서(6차5회) 1부.

3. 합의각서(6차5회) 1부.  끝.