투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청(오목지하차도 출입구변경공사 실시설계용역)

우리 사업소에서 시행중인 오목지하차도 출입구변경공사 실시설계용역에 대한 준공기한을 다음과 같이 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 오목지하차도 출입구변경공사 실시설계용역

나. 계 약 자 : ㈜천마엔지니어링건축사사무소 대표 선종천

다. 준공기간 변경

- 당 초 : 2016. 03. 31 ~ 2016. 05. 09

- 변 경 : 2016. 03. 31 ~ 2016. 06. 30

라. 연기사유

- 2016.4.29. 제출된 용역 최종보고서 검토결과 본 사업의 기확보된 예산(63,000천원)을 초과하는 공사비가 산출되어져 설계서 재검토 등을 위한 준공기한 연기조치

마. 지체상환금 부과여부 : 미 부과

따로붙임  1. 준공기한 연기보고서(방침서) 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝

	시설보수과장
주무관	윤동원		시설보수과장	05/03 박병연
협조자
시행	시설보수과-3693	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7976	/전송	02-2657-7950	/		/	대시민공개