문서번호	운영과-1326
결재일자	2016.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	난지물재생센터소장
김광모		김웅남	05/04 최홍식
협 조
	주무관			代박정호

2016년 물재생 기계설비 보수공사 작업계획(1차)

서울특별시 난지물재생센터

(운영과)

2016년 물재생 기계설비 보수공사 작업계획(1차)

물재생 1,2처리장 고장 기계설비에 대하여 2016년 물재생 기계설비 보수공사(연간단가)에 따라 다음과 같이 보수하여 하수처리에 철저를 기함.

사업개요

- 사 업 명 : 2016년 물재생 기계설비 보수공사(연간단가)

- 사업기간 : 2016. 3. 28 ~ 12. 23

- 사업금액 : 251,813,750원

- 계약업체 : 세양건설(주) 대표 기세광

작업내용

번호	위치	공사내용	근거	비고
1	1처리장 종침	1-1 반송슬러지 조절밸브 철거후 단관설치	운영과-1117	붙임1
2	1처리장 종침	종침 1-2, 8지, 2-8지 슬러지수집기 대차바퀴, 베어링 등 정비	운영과- 1211,1304	붙임2
3	1처리장 초침	초침 1-3지 슬러지수집기 체인, 플라이트 등 교체	운영과-968	붙임3
4	2처리장 초침	초침 6-3,4,5,6,7,8지 슬러지수집기 체인, 슈 등 교체	운영과-1069, 1070,1310	붙임4
5	2처리장 종침	4계열 반송슬러지 엘보, T배관 누수로 교체(주철관 → 스텐레스관)	운영과-1321	붙임5
6	2처리장 종침	6계열 누수 및 고장 체크변 교체(8개소)	운영과-1311	붙임6
7	1처리장 초침	초침 스컴스크린 3호 정비	운영과-1199	붙임7

행정사항

- 2016. 7. 22일한 완료

- 지침서 및 내역서에 의한 시공여부 확인 철저

- 공종 및 물량 변동시 정산 후 설계변경 시행

- 완료 후 내역서 및 사진 첨부한 완료보고서 제출

첨부 : 관련 보고서 1부.  끝.