투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시지방경찰청장(교통관리과장)
(경유)
제목	공사중 교통처리계획 (변경)승인요청(용두3 빗물펌프장 신설공사)

1. 교통관리과-230(2016.01.05.)호, 교통행정과-(2016.05.03.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 기상이변에 따른 돌발성 집중호우에 대비하고자 시행중인『용두3 빗물펌프장 신설공사』와 관련하여 관계기관의 지장물이설공사로 인해 빗물펌프장 하수관설치공사가 지연되어 교통소통대책에 따른 왕산로 점용기간 추가요청하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 용두3 빗물펌프장 신설공사

나. 개  요 : 펌프장 신설 Q=170㎥/분

다. 위  치 :

펌 프 장 - (구도)천호대로25길(대명랜드마크타워 옆)

유입관로 - (시도)왕산로(용두119안전센터 ~ 용두교)

라. 공사기간 : 2016. 01. 01 ~ 2016. 06. 30

마. 공사방법 : 펌 프 장 ~ 전일공사(00:00 ~ 24:00)

유입관로 ~ 야간점용공사(22:00 ~ 06:00)

바. 왕산로 점용 추가 요청기간 : 2016.05.06.~2016.05.14.(09일간)

※ 특기사항 : 공사시간, 공사방법은 기존 교통소통대책서와 동일

붙 임 : 교통처리계획 종합총괄도  1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	노태학		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	05/04 代이도헌
협조자
시행	방재시설부-6589	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개