문서번호	방재시설부-6593
결재일자	2016.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	05/04 代이도헌
협조

-공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사 폐기물처리용역-

설계변경(총차2회, 2차1회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

<공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사 폐기물처리용역>

설계변경(총차2회, 2차1회)검토보고

서울시 시설관리공단에서 제출한 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사 폐기물처리용역 설계변경(총차2회, 2차1회)에 대한 적정성 검토보고사항임

용역개요

◦ 용 역 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사 폐기물처리용역

◦ 용역개요 : 폐콘크리트 2,562톤, 폐아스콘 809톤

◦ 용역기간 : 2013. 4. 29 ~ 2016. 6. 30(2차:2015.12.15.~2016.6.30.)

◦ 도 급 액 : 95,414천원(2차 45,414천원)

◦ 용 역 사 : ㈜하경엘씨 대표 곽봉기

◦ 위탁감독 : 서울시시설관리공단 공사감독2처

설계변경현황

1) 총차2회 및 2차1회

구 분	금 액			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
총 차 용 역 비	95,414,000	144,628,000	증) 49,214,000
금차(2차) 용역비	45,414,000	94,628,000	증) 49,214,000

2) 설계변경사유

- 공릉2빗물펌프장 유입관로 부설구간 혼합폐기물 발생에 따른 신규공종 발생

구 분	단위	수량	금 액	증 · 감
혼합폐기물 운반 (L=28.4㎞)	ton	0	0	증) 11,982,540
		914	11,982,540
혼합폐기물 처리	ton	0	0	증) 32,757,760
		914	32,757,760

조치의견

◦ 위탁감독의 설계변경도서를 검토한 바. 관련규정에 적정하므로 설계변경(총차 2회, 2차 1회)하여 용역추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 1. 위탁감독 검토의견서 1부

2. 총차 2회, 2차 1회 설계변경내역서 1부.

3. 실정보고 승인서류 1부. 끝.