문서번호	설비부-7153
결재일자	2016.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
진종구		김창균	05/04 권오식
협조

서울과학관 건립 정보통신공사

통합배선반 변경 검토보고

2016. 05.

도시기반시설본부

(설비부)

서울과학관 건립 정보통신공사

통합배선반 변경 검토보고

「서울과학관 건립 정보통신공사」의 통합배선반 변경에 관하여 검토하고 보고 드림.

1		사업개요

❍ 사 업 명 : 서울과학관 건립 정보통신공사

❍ 위    치 : 서울특별시 노원구 한글비석로 168

❍ 사업규모 : 지하1층/지상3층(연면적 12,330㎡)

❍ 주요설비 : CCTV, 전관방송, 정보통신 설비 등

❍ 사업기간 : 2014. 1.13. ~ 2016. 5.31.

❍ 사 업 비 : 1,804백만원(도급비 904,  관급비 900)

- 통합배선반 : 209백만원(에이디지털미디어  대표자 정채옥)

2		관련근거

❍ 통합배선반 변경 실정보고(정과감 제16-141, ‘16.4.20)

- 도급공사와 중복 설계된 물량 삭제

- 시립과학관 인수부서 요구사항 반영

3		검토결과

❍ 도급공사와 중복된 물량 삭제

- 주 배선반(MDF) 및 중간단자함(IDF)내 광분배반 등 일부가 도급공사와 중복되어 물량삭제 필요

❍ 과학관 인수부서 요구사항 반영

- 이원화로 계획된 행정망과 인터넷망을 일원화하고

- 과학관 홈페이지 구축에 필요한 서버 등 통신장비 추가

☞ 변경내역                                            (단위 : 천원)

구 분	변경내용	검토결과	소요예산	증·감
도급공사 중복물량	- MDF 및 IDF내 배선반류	삭제	-25,215	1,907
인수기관 요구사항	- 통신망 일원화 - 홈페이지구축 서버 등 구매	추가	27,122

4		조치의견

❍ 위와 같이 현장 여건에 맞게 관급자재 변경에 대한 실정보고를 승인하고 통합배선반은 계약변경 의뢰하고자 함.

붙임 : 통합배선반 변경 실정보고서 1부.  끝.