문서번호	급수운영과-8857
결재일자	2016.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
박홍선		조상덕	05/04 정경효
협 조
	시설관리과장			박희철
	주무관			송종학

『누수발생에 취약한 아연도강관 등』 노후 인입급수관 일제 정비계획

2016년 5월

강남수도사업소

(급수운영과)

『누수발생에 취약한 아연도강관 등』

노후 인입급수관 일제 정비계획

누수발생 빈도가 높은 아연도강관, PVC관 등 노후 인입급수관을 사전에 정비하여 유수율 제고 및 유지관리 업무에 철저를 기하고자 함

▸ 「노후 인입급수관 일제정비계획 보고」(누수방지과-3435) 관련 세부 추진계획

1		현 황

○ 노후 인입급수관 (50㎜ 이하) : 121m

∘ 급수운영과(강남구) : 112m, 시설관리과(서초구) : 9m

구 분	소 계	15㎜	25㎜	50㎜
소 계	121m	9m	15m	97m
아연도강관	106m	9m		97m
PVC관	15m		15m

○ 전체 노후 인입급수관 121m 내역

∘ 일반지역의 노후 인입급수관 : 24m

- 강남구 신사동 667-12 : PVC관 D=25mm, L=15m

- 서초구 내곡동 102-5 : 아연도강관 D=15mm, L=9m

∘ 재건축지역내 노후 인입급수관 : 97m

- 강남구 개포동 660-5 : 아연도강관 D=50mm, L=52m 개포주공5단지(사업시행인가)

- 강남구 개포동 189-5 : 아연도강관 D=50mm, L=45m 개포주공4단지(사업시행인가)

2		정비 계획

□ 조사 및 정비기간 : 2016. 5. 4 ~ 6. 30

○ 현장조사 : 2016. 5. 4 ~ 5. 20

○ 정비기간 : 2016. 5. 23 ~ 6. 30

□ 정비 방법

○ 일반지역의 인입급수관

∘ 강남․서초구 관내 상수도공사 연간단가계약업체에 작업지시하여 정비시행

∘ 속성자료 수정이 필요한 경우 GIS 담당자에게 통보하여 수정조치

∘ 지장물로 인한 공사 불가 등 기타 사항 발생시 노후관대장 등재 집중관리

○ 재건축 지역 인입급수관

∘ 사업시행 인가 단계 : 정비대상에서 제외하되 노후관대장 등재 집중관리

(노후관 정비시 중복 투자의 논란있음)

※ 단, 적수출수 및 소출수 민원발생 등 사안에 따라 선별적으로 인입관정비 시행

∘ 관리처분 단계(실질적인 사업 진입단계) : 이주 및 철거시 즉시 분기점 폐쇄                          GIS 시스템에서 인입급수관 이력 삭제

∘ 착공단계 : GIS 시스템에서 재건축지역내 상수도관 이력 삭제

3		행정 사항

○ 해당지역의 노후인입관 정비 및 GIS 시설자료 수정통보 : 지역담당자

○ 담당자별로 주 1회 실적관리

붙임 : 1. 노후 인입관 현황 1부.

2. 관리대상 재건축 현황 1부.  끝.