문서번호	도로보수과-4274
결재일자	2016.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		代이상하	05/04 배광환
협조
	주무관		이상하

2016년 도로교통소통개선사업

시행계획 보고(증산로)

2016.  05. 04(수)

서부도로사업소

(도로보수과)

2016년 도로교통소통개선사업

시행계획 보고(증산로)

은평구 증산로 증산지하차도 앞 측대확보를 위한 노면표시 차로조정 후 중앙분리대를 설치하여 교통소통을 원활히 도모하기 위한 개선사업을 시행코자 함.

□ 관련근거

○ 도로교통소통개선사업 예산 추가 배정 알림(증산로 등 4개소)

- 교통운영과-8020(2016.05.04)

- 재배정액 : 60,370천원

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2016년 도로교통소통개선사업

○ 위    치 : 은평구 증산로 증산지하차도 ~ 증산3교 간

○ 총사업비 : 60,370천원

○ 개선내용 : 중앙분리대 설치, 충격흡수시설 설치, 노면표시 개선

○ 사업구간 위치 및 설계도

증산지하차도 중앙분리대 설치

□ 공사내용

○ 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 : 18,290천원(관급자재포함)

- 노면표시 도색   : 3,101m

- 노면표시 제거   : 1.120m

○ 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사 : 42,080천원(관급자재포함)

- 중앙분리대 설치(SB4등급) : 71경간(220m)

- 단부설치                  : 1개소

- 단부처리충격흡수시설 설치 : 1개소

- 시선유도봉 철거           : 16개소

□ 조치계획

○ 교통개선공사 발주 시 업체선정까지 기간소요 등으로 별도 발주 시행은 곤란하여 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 및 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사에 포함하여 시행하고자 함.

- 공사기간 : 2016. 05. 09. ~ 2016. 06. 10.

- 필요금액 : 약60,370천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

○ 관급자재 사용검토

- 노면표시 도색공사에 사용되는 특수페인트는 2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사의 납품 계약된 수량 사용 후 정산.

- 교통안전 부속물공사에 사용되는 중앙분리대 관급자재는 조달구매로 설치완료하고 추후 정산.

○ 사업비 집행 현황

(단위 : 천원)

사업명	예산배정액	노면표시		교통부속물		집행잔액
		도급비	관급비	도급비	관급비
도로교통소통개선사업	60,370	14,260	4,030	17,738	24,342	0

○ 예산과목

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통소통개선사업, 시설비(401-01)

□ 향후계획

○ 2016. 05. 03 : 개선공사 작업지시 및 공사 시행.

○ 2016. 05. 03 : 관급자재 구매 의뢰

○ 2016. 06. 10 : 개선공사 완료

○ 2016. 06. 15 : 설계변경 정산 및 개선공사 결과보고

붙 임 : 1. 설계내역서 2부.

2. 설계도면 1부.

3. 관련 문서 1부.  끝.