문서번호	설비부-7194
결재일자	2016.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
진종구		김창균	05/09 권오식
협조

서울과학관 건립 정보통신공사

CCTV설비 변경 검토보고

2016. 05.

도시기반시설본부

(설비부)

서울과학관 건립 정보통신공사

CCTV설비 변경 검토보고

「서울과학관 건립 정보통신공사」의 CCTV설비 변경에 관하여 검토하고 보고 드림.

1		사업개요

❍ 사 업 명 : 서울과학관 건립 정보통신공사

❍ 위    치 : 서울특별시 노원구 한글비석로 168

❍ 사업규모 : 지하1층/지상3층(연면적 12,330㎡)

❍ 주요설비 : CCTV, 전관방송, 정보통신 설비 등

❍ 사업기간 : 2014. 1.13. ~ 2016. 5.31.

❍ 사 업 비 : 1,804백만원(도급비 904,  관급비 900)

- CCTV : 131백만원(금성보안  대표자 송완주)

2		관련근거

❍ CCTV설비 변경 실정보고(정과감 제16-166, ‘16.5.2.)

- 시립과학관 인수부서 요구사항

3		검토결과

❍ 영상감시 사각지대 해소를 위해 카메라 추가설치 필요

- 추가물량 : 카메라 9대(과학관 옥상 4대, 과학관 외곽 5대)

- 소요예산 : 43,000천원

4		조치의견

❍ 위와 같이 현장 여건에 맞게 인수기관 요구사항 반영하여 관급자재 변경 실정보고를 승인하고, CCTV 계약변경 의뢰하고자 함.

붙임 : CCTV설비 변경 실정보고서 1부.  끝.