서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	국토교통부장관(공공주택공급과장)
(경유)
제목	서울세곡 국민임대주택단지예정지구 지정변경 및 실시계획변경(사업기간 연장) 요청

1. SH공사 택지계획부-1692호(2016.5.3.)와 관련입니다.

2. 우리시 SH공사에서 시행중인 서울세곡 국민임대주택단지 조성사업의 사업기간 연장을 위한 국민임대주택단지예정지구 지정변경 및 실시계획 변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사항(2공구 사업기간 연장)

- 2공구 : 당초 준공일 2016.6.30. → 변경 준공일 2017.12.31

나. 연장사유 : 2공구(연결녹지 등)의 조성 등을 위한 사업기간 필요

붙 임 : 1. SH공사 변경 요청문서 1부.

2. 개발계획 및 실시계획 변경 신청서.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최영		택지개발팀장	김준표		임대주택과장	05/09 임인구
협조자
시행	임대주택과-5487	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)