문서번호	도시철도건축부-3330
결재일자	2016.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축공사과장	도시철도건축부장
문석훈		김내환	05/10 문인식
협조	주무관		김용선
	주무관		허웅

937정거장 외부출입구 계단위치 검토 보고

2016. 5.

도시기반시설본부

(도시철도건축부)

『937정거장 외부출입구 계단위치 검토보고

「서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사」와 관련 937정거장 출입구에 병행 설치되는 계단과 E/S의 배치를 첨두시 혼잡을 감안하여 이용승객이 편리하게 이동할 수있도록 조정하고자 함

1

외부출입구 현황

❍ 외부 출입구

- 개 소 : 2개소

- 형 태 : 계단 및 E/S(상·하행) 병행설치

❍ 현재 공정

- 1번 출입구 : 터파기공사 준비 중

- 2번 출입구 : 터파기공사 중

❍ 계단 설치위치(E/S과 병행설치)

- 1번 출입구 : 정거장 기준 E/S보다 안쪽에 계단설치

- 2번 출입구 : 정거장 기준 E/S보다 바깥쪽에 계단설치

2

검 토 내 용

❍ 첨두시(피크타임) E/S를 이용하려는 승객이 일시에 집중되어 혼잡이 우려되므로 계단과 E/S의 위치 조정이 필요

❍ E/S와 병행 설치하는 계단은 대합실 집·개표구로부터 가까운 쪽에 배치하고 E/S는 먼 쪽으로 배치하여 E/S로 인한 혼잡을 방지

❍ 도시철도의 특성상 첨두시(출·퇴근시 등)에 일시적으로 군집동선이 형성되므로 집·개표구로부터 먼쪽(정거장기준 바깥쪽)으로 E/S를 설치하여 수직이동 동선의 분산유도가 필요함

3

조 치 계 획

❍ 2번 출입구의 계단을 정거장 기준 E/S보다 안쪽으로 설치하는 것으로 변경

937 정거장 계단 계단 E/S E/S 1번 2번		2번 1번
변경 전		변경 후

E/S

E/S

계단

계단

937 정거장

❍ 시공단계에서 계단과 E/S의 위치변경으로 물량변경이 없으므로 공사비 증감없이 설계변경 처리

❍ 변경된 내용으로 시공될 수 있도록 현장(책임건설사업관리기술자)에 통보하고 준공도면에 반영될 수 있도록 조치.  끝.