투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약(총차 7회) 및 5차공사 발주의뢰

우리본부에서 시행중인 「신상도 지하차도 확장공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약(총차 7회) 및 5차공사 발주를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신상도 지하차도 확장공사

나. 공사기간 :  총차  2007.12.31 ~ 2018.12.31

다. 도 급 비 : 11,722,115천원

라. 도 급 자 : (유) 한백종건 외 1

마. 설계변경사유 : 붙임 검토보고서 참조

바. 설계변경 내역(총차 7회)

구 분		금 액(천원)			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
도 급 비		11,723,096	11,762,278	증 39,182
	공 급 가 액	10,657,360	10,692,980	증 35,620
	부가 가치세	1,065,736	1,069,298	증 3,562
	소 계	11,723,096	11,762,278	증 39,182

사. 5차공사 발주내역

구 분		금 액 (원)	비 고
총 공사비		364,000,000
	공 급 가 액	55,850,000
	부가 가치세	5,585,000
	도 급 비	61,435,000
이 설 비		302,565,,000

- 공사물량 : 기존건물 철거 1식 등

- 공사기간 : 착공일로 부터 ~ 2016. 12. 31

아. 예산과목

- 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 신상도 지하차도 확장,  시설비

붙임 : 1. 설계변경 및 5차공사 발주 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차7회) 및 5차공사 발주 내역서 각 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	송민영		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	05/10 임춘근
협조자	계약1팀장	김점선
시행	방재시설부-6760	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8762	/전송	02-3708-8756	/	songmy01@seoul.go.kr	/	대시민공개