문서번호	소방행정과-6226
결재일자	2016.5.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
이호경	황인대	代이환종	05/10 이귀홍

본서 2층 구급여직원 대기실 확장 및 119안전센터 기타공사 계획

2016. 05. 10

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

외근 출동대원 대기실등 환경개선

최근 여직원 증원에 따라 협소한 본서2층 여직원 구급대 대기실을

확장하고, 당산119안전센터 2층 샤워실 방수 및 노후된

신길119안전센터 보일러실 가스순간온수기 등을 교체하여

근무환경 개선 및 시설물유지관리 운영 만전 기하고자 함

Ⅰ. 추진 근거

소방행정과-96(2016.01.04.)호 『2016년도 소방안전특별회계 예산편성 결과 알림』

Ⅱ. 예산 현황

확보예산 : 금46,481천원

예산과목 :직무환경개선/소방관서보수,보강공사/시설비(401-01)

Ⅲ. 사업 현황

연번	사 업 명	확보예산 (천원)	연면적(㎡)	준공년월	계약방법
1	본서 2층 구급여직원 대기실 확충 공사	9,900	4,403.14중 (28)	1996.12	전자수의시담 (수의계약)
2	당산센터 2층 샤워실 방수 및 기타 환경개선 공사	13,500	400.04	1994.10	〃
3	신길119안전센터 가스보일러 설치 및 기타공사	15,301	516.46	1992.02	〃
4	대림119안전센터 내진성능 평가	7,780	780.3	2000.11	〃
	계	46,481

Ⅳ. 세부추진 일정

본서 2층 여직원 구급대기실 확장 및 기타공사

○ 기존 벽체 및 조적벽 철거

○ 휀코일 철거후 확장부분 전기 온돌 설치

○ 확충 부분 바닥재 교체 및 도배

○ 사물함(6인 기준), 침대, 접의식 책상,신발장 설치

○ 복도 벽면 무늬목 시트지 부착 등

○ 세부 추진계획

일 정	세 부 일 정	비 고
5.11 ~ 5.12	발주계획수립, 산출기초조사(시장가격조사)
5.13	입찰공고 및 계약체결
5.14 ~5.23	착공, 준공, 검사(수), 대금지급

당산119안전센터 2층 샤워실 방수 및 기타 환경 개선공사

○ 2층 샤워실 방수 및 배관 교체 공사

○ 1층 사무실 바닥재 교체 및 도장

○ 2층 대기실 침대 칸막이 설치 등

○세부 추진계획

일 정	세부일정	비 고
5. 23 ~ 5. 25	발주계획수립, 산출기초조사(시장가격조사)
5.26 ~ 5. 27	입찰공고 및 계약체결
5. 30 ~ 6. 10	착공, 준공, 검사(수), 대금지급

신길119안전센터 보일러실 연도 교체 및 가스보일러 설치 공사

○ 지하 보일러실 연도 외부 설치

○ 가스순간 온수기 설치

○ 보일러 배관 일부 교체 및 1층 외부 방수 등

○ 세부 추진계획

일 정	세부일정	비 고
5. 30 ~ 6. 3	발주계획수립, 산출기초조사(시장가격조사)
6.13 ~ 6. 15	입찰공고 및 계약체결
6. 16 ~ 6. 30	착공, 준공, 검사(수), 대금지급

대림119안전센터 내진성능 평가

○ 준공년월 : 2001.11.(1/3층,708.3㎡)

○ 내진 평가 대상 : 지상3층 이상, 연면적 500㎡ 이상

○ 세부 추진계획

일 정	세부일정	비 고
6. 13 ~ 6. 17	발주계획수립, 산출기초조사(시장가격조사)
6.20 ~ 6. 24	입찰공고 및 계약체결
6. 27 ~ 7. 31	착공, 준공, 검사(수), 대금지급

붙임  1. 본서 2층 구급여직원 대기실 확장공사 배치도 1부.

2. 당산119안전센터 청사환경 개선순위 1부.

3. 신길119안전센터 보일러 사진 1부 . 끝.