서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰(서울새활용플라자 주변 환경개선 기본구상 용역)

1. 자원순환과-7177(2016.5.10.)호와 관련입니다.

2. 「서울새활용플라자 주변 환경개선 기본구상 용역」에 대하여 아래와 같이 용역 준공기한 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 서울새활용플라자 주변 환경개선 기본구상 용역

- 계 약 자 : ㈜ 종합건축사사무소 에스아이랩 (대표 한용희)

- 계약금액 : 금18,400천원

나. 준공기한 연기내용

구 분	용역기간	용역비(계약금액)	비고
당 초	2016. 3. 15 ~ 5. 14	18,400,000원	용역비 변경 없음
변 경	2016. 3. 15 ~ 6. 15

붙 임 :  1. 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	자원순환과장
주무관	김미영		재사용플라자개관추진팀장	김현주		자원순환과장	05/10 代최규동
협조자
시행	자원순환과-7214	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 1동 12층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3684	/전송	2133-1026	/	imanon@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)