문서번호	방재시설부-6793
결재일자	2016.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	05/11 임춘근
협조
	주무관		임성은

「경의선숲길 공원조성공사」 - 와우교 구간

인접 주택가 전면부 보도포장 확대 실정보고 검토

2016. 05

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사-와우교구간』

인접 주택가 전면부 보도포장 실정보고 검토

「경의선숲길 공원조성공사」 - 와우교 구간 인접 주택가 전면부 보도포장 확대에 대한 실정보고 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2016–168(2016.04.26.)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 A=84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : 2013.9 ~ 2016.3

○ 공 사 비 : 14,908백만원

Ⅱ

실정보고 내용

○ 실정보고 사유

- 와우교구간 인접 주택가 비포장 및 포장상태가 불량하여 인접 주택가 주민     으로부터 지속해서 보도포장 요청 민원이 있어 보도 포장 면적을 확대하여     주민편의와 미관을 개선하고자 함.

- 위치도 및 전경 (마포구 창전동 3-1 일원)

- 시행방안

당 초	변 경

- 수량 변경 및 소요 공사비 현황

공 종	규 격	단위	당초	변경	증,감	비고
소형고압블록	t=6cm	㎡	47.0	108.8	증) 61.8
경계석	120*120*1000	m	-	54	증) 54.0	잔여관급자재 유용

※ 소요공사비 : 약 2백만원 증액(계약단가 적용, 부가세 포함)

Ⅲ

건설사업관리기술단 검토의견

○ 상기와 같이 경의선숲길 공원조성공사 와우교구간 인접 주택가 보도포장      확대 실정보고에 대하여 검토한 결과 공원 경계부 인접 주택가 전면부      비포장 및 포장상태가 불량함에 따라 정비하여 주민 민원 해소 및 미관을     개선함이 타당한 것으로 판단되며, 소요 공사비는 약 2백만원 증액됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 와우교 구간 인접 주택가 주민 편의 및 공원 주변 미관 개선을 위한 보도포장 확대에 대한 건설사업관리기술단의 의견이 타당하다고 판단되어 승인 통보하여, 차후 설계 변경에 반영 조치코자 합니다.

붙  임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.