문서번호	총무과-7690
결재일자	2016.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
강상천		박병현	05/11 이상국
협 조
	기획예산과장			김건태
	주무관			심옥경

본부청사 조경수목 종합방제

및 생육환경 개선 공사

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				20백만원

2016. 05

한강사업본부

총 무 과

본부청사 조경수목 종합방제 및 생육환경 개선 계획

본부청사 조경 수목(소나무, 벚나무 등)이 강변북로 변에 식재되어 생육 환경이 열악하고 병충해 피해 및 고사 징후를 보이고 있어, 수목에 대한 방제 및 생리 증진제 투약 등 집중관리 하고자 함

■ 사업기간 : ‘16. 5. 2 ~ ‘16. 6. 7

■ 사업대상

❍ 수목방제 및 생육증진

- 방    제 : 소나무, 벚나무 종합방제 2회

- 생육증진 : 수간주사 및 생리증진제 처리

❍ 수관정비

- 소나무 및 둥근소나무, 벚나무 수관정비

■ 소요예산 : 19,910천원(부가가치세 포함)

❍ 예산과목 : 한강사업본부 청사시설개선 및 유지관리, 시설비

■ 추진방법 : 수의계약

■ 추진계획

❍ 2016. 5. 2 ~ 5. 4 : 현장조사 및 보수방안 검토

❍ 2016. 5. 9 ~ 5.12 : 방침 및 공사 발주

❍ 2016. 5.16 ~ 5.20 : 공사 계약 및 공사 착공

❍ 2016. 5.23 ~ 6. 7 : 공사 추진

❍ 2016. 6. 7 : 공사 준공(예정)

별첨 : 내역서 1부.