문서번호	생태공원과-1320
결재일자	2016.5.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	생태공원과장	공원부장
임이환	최병언	05/11 장상규
협 조

뚝섬 한강공원 하이브리드 공원등 설치계획

2016. 5

공 원 부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

뚝섬 한강공원 하이브리드 공원등 설치계획

한강공원 신재생에너지 체험거점 조성의 일환으로 추진하고 있는“뚝섬 에너지 주제공원 조성”의 추진효과 극대화를 위하여 하이브리드 공원등 추가사업을 시행코자 함.

★ 2016 한강몽땅 여름축제 이전에 시공완료 ★

Ⅰ		추진근거

○ 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법

○ 신·재생에너지 설비의 지원·설치·관리에 관한기준

○ 녹색에너지-4858(‘16.3.18) 『뚝섬안내센터 에너지 주제공원

체험거점 조성계획』

○ 녹색에너지-7977(‘16.4.29) 『뚝섬한강공원 에너지 주제공원

조성사업 추가』

Ⅱ		추진경위

○ ‘16. 3. 21 : 한강공원(뚝섬) 태양광발전설비 설치예산 재배정(본청)

○ ‘16. 4. 15 : 한강공원 신재생에너지설비 설치대상 추가파악(합동점검)

○ ‘16. 4. 25 : 뚝섬한강공원 신재생에너지설비 사업설명서 제출

○ ‘16. 4. 29 : 한강공원(뚝섬) 에너지 주제공원 조성사업 추가통보(본청)

Ⅲ		세부추진계획

<구매설치>

○ 조달구매 방향

- 발전효율과 디자인 등 매우 우수한 국내 최고의 제품 선정

- 신뢰성 있는 납품․시공 업체를 선정하여 부실시공 방지

- 납품후 향후 3년간 시설물의 운영ㆍ관리, 유지ㆍ보수 등에 대한 사후관리

책임을 성실히 이행 할 수 있는 제품

- 현장 조립ㆍ설치조건

○ 사업내용

- 최근 조성된 편백숲 주변 어두운곳 조도보강 및 노후 공원등 정비

- 조명 및 신재생에너지 간 융합된 에너지 절약형 조명시설 설치

○ 구매방법 : 조달구매(3자단가)

○ 구매금액 : 105,627천원(부가세+조달수수료포함)

○ 제작규모 : 하이브리드 공원등 15본(H 7m, 60W), 등기구(60W) 15개

- 신재생에너지(본당 발전량) : 풍력 300W, 태양광 250W

- 신규 2본, 교체 13본(MH 100W→ 고효율 60W)

○ 설치위치 등 이미지(본청 녹색에너지과에서 디자인 등 심사필)

위치	현장전경	하이브리드 공원등

<전기공사>

○ 업체선정 : 전기공사업법 제4조에 따라 전기공사업 등록한 전문업체로서 성실하고 숙련된 기술력과 저렴한 견적서를 제출한 남화전기(성동구 금호동)로 하여금 작업완료후 보수비를 지정계좌로 입금조치

- 작업 소요일자 : 20일

- 작업내역 : 공원등 15본 철거, 등주내 배관ㆍ배선 1식 등

- 소요예산 : 4,078천원

Ⅳ		예산사용

○ 예 산 액 : 110,000,000원(시비)

○ 예산과목

- 에너지절약과 생산으로 원전하나 줄이기/신재생에너지보급/한강변

신재생에너지 벨트 조성/시설비

Ⅵ		향후추진일정

○ 발주방침서 작성  : 2016. 5. 10

○ 품의서 작성 및 발주  : 2016. 5. 11

○ 제작 및 설치기간 : 2016. 5. 13 ~ 6. 15

○ 시운전 및 검수   : 2016. 6. 17~ 6. 20

○ 시공준공         : 2016. 6. 24

○ 관리카드 작성     : 2016. 6. 25.

첨부 : 전기설계서 1부. 끝.