문서번호	시설보수과-1837
결재일자	2016.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	05/11 이종엽
협 조

감독기관의 검토보고서 제출에 대한 검토결과 보고

[시조사삼거리 교차로구간 개선공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

성동도로사업소

(시설보수과)

감독기관의 검토보고서 제출에 대한 검토결과 보고

[시조사삼거리 교차로구간 개선공사]

‘시조사삼거리 교차로구간 개선공사’를 수행함에 있어 현황 및 문제점에 대한 감독기관의 검토보고서 제출에 따른 검토 보고임

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 시조사삼거리 교차로구간 개선(청량제1고가 성능개선 포함) 공사

공사기간 : 2014.12.18.~2016.06.30.

도 급 비 : 3,688,190,000원

도 급 자 : ㈜특수건설  대표 김중헌

공사개요 : 차도확장 – B=3.0m, L=306m

(고가차도 성능개선 1개소, 보도육교 철거 1개소 포함)

Ⅱ		현황 및 문제점

가로수 보호덮개 설치

- 설계도면상 가로수 보호덮개 반영 되어 있으나, 내역서상 누락

EGI휀스 설치

- 거더철거 후 현장 작업구간내 안전을 위한 현장울타리 필요

THP관 부설

- 교대(A1) 벽체전면부에 철도부지 우수처리용 THP관이 매설되어 있으나, 교대보수보강을 위한 터파기식 철거 및 재설치가 불가피함

Ⅲ		감독기관 검토의견

식재된 가로수 보호를 위하여 설계도면과 같이 보호덮개 설치 내역 반영

: 수목보호덮개 설치 37조

현장 작업구간 안전 및 외부인 출입통제를 위한 EGI휀스 설치

: H=2.4m, L=33m(A1측 20m, A2측 13m)

우수처리용 THP관 철거 후 재설치 : D=200mm, L=42m

개략공사비 : 약 23,794천원 증

Ⅳ		조 치 계 획

상기와 같이 공사 감독기관의 검토보고 사항에 대하여 검토한 바, 안전사고 예방과 원활한 공사수행을 위하여 감독기관의 검토의견과 같이 반영하는 것이 타당하다고 판단됨

다만, 공사비 증액은 금년도에 기확보한 예산범위 내에서 집행이 가능한 바, 예산 현황 및 설계변경 증·감사항 등에 대하여 종합적으로 검토 후 시행토록 조치하고,

공사비는 실 시공물량에 맞춰 정산 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  감독기관 검토보고 및 관련 공문 1부. 끝.