서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	파워개발(주) 대표이사 박석흠 귀하
(경유)
제목	영동대교보수공사 하자보수 지연에 따른 우기전 완료 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 영동대교보수공사 하자보수가 당초 완료예정일(2016년 5월 7일) 보다 지연됨에 따라 지연사유 및 수정공정표를 제출하여주시고, 우기전(6월말) 완료될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

3. 또한, 공간 비계작업 시 작업발판을 미끌림이 발생하지 않도록 견고하게 체결바라며, 작업자의 안전밸트, 안전모 등 안전장구 착용에 철저를 기하여 안전사고가 발생하지 않도록 특별관리하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 영동대교 하자보수 공사 시 준수사항 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이제택		강구조교량팀장	代김시련		교량안전과장	05/11 박문희
협조자
시행	교량안전과-8354	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관1동2층	/
전화	02-2133-1963	/전송	02-2133-1429	/	ljt0706@seoul.go.kr	/	대시민공개