함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
(경유)
제 목	설계변경 심의요청(2015년 강서,양천,구로구일대 긴급누수복구공사)

1. 우리사업소에서 시행중인「2015년 강서, 양천, 구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속단가)」에 대하여 아래와 같이 계약금액 변경을 위한 설계변경(2회-최종) 심의요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 강서, 양천, 구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속단가)

나. 공사기간 : 2015. 6. 1 ~ 2016. 6. 30

다. 도 급 비 : 금2,468,469,100원

라. 도 급 자 : 라텍씨앤씨(주), 대표 박 기 춘

㈜ 한 신 산 업,   대표 조 근 용

마. 설계변경사유 : 신규공종 및 공종별 물량 증 ․ 감 발생

바. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 기타교체비(상수도관 누수복구)

상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 수선교체비(불용관정비)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비, 노후상수도관(배급수관)정비)

사. 설계변경내역                                                        (단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감	비 고
도 급 비	2,468,469,100	2,710,158,000	증)241,688,900	증)9.79%

붙  임  1. 설계변경 계획(계약금액 변경) 1부

2. 설계변경 내역서(2회-최종) 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	박학중		시설관리팀장	김근용		시설관리과장	전결 05/12 代김근용
협조자	주무관	문병희
시행	시설관리과-11618	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02)3146-4011	/전송	3146-4039	/	harkjung10@hanmail.net	/	대시민공개