문서번호	기전과-3644
결재일자	2016.5.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전과장
차준원	05/13 代문준호
협 조

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경 요청에 따른 검토보고(전농로10길-신호)

2016. 5

성동도로사업소

(기 전 과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경 요청에 따른 검토보고(전농로10길-신호)

교통안전시설물 원인자 부담공사 변경요청과 관련서류 및 현장 확인후 그 결과를 보고합니다.

□ 관 련 근 거

○ 서울지방경찰청 교통관리과-9077호(2016.4.6)

○ 동대문구청 공원녹지과-6708호(2016.05.07)

○ 대영유비텍(주) 대영GE 16C-05-01호(2016.05.11)

□ 공 사 개 요

○ 공 사 명 : 전농로 10길 교통신호등 정비공사

○ 공사구간 : 동대문구 전농로10길(전농SK아파트~답십리청솔우성아파트)

○ 공사개요 및 변경사유

구분	공사개요	공사기간	공사참여자
			감리	설계	시공	원인자
변경전	****************************************************************************************	2015.11.27∼ 2016.05.30	대영유비텍(주)		㈜일신티에치이	동대문구청 공원녹지과
변경후	***********************************************************************************
변경사유	기존 신호교차로 철거 후 회전교차로 신설 추가규제

□ 검 토 결 과

- 교통안전 시설물 설치에 대한「교통안전시설물 원인자부담공사」공사 변경요청건에 대하여 검토결과 추가 규제(회전교차로 신설)로 인하여 상기 공사에 대하여 공사변경을 승인 하고자 합니다.

붙   임 : 1. 변경 승인요청 1부.

2. 교통 규제심의 1부.

3. 감리사 실정보고 및 설계변경 서류 제출 1부.

4. 변경 내역서 1부.

5. 공사도면 2부. 끝.