문서번호	버스정책과-8719
결재일자	2016.5.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	정류소관리팀장	버스정책과장
이오수	정순종	05/13 이상훈

【2015년 가로변 정류소 이용환경개선 전기공사】

설계 변경 시행

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시교통본부

(버스정책과)

2015년 가로변정류소 이용환경개선 전기공사 설계변경

2015년 가로변정류소 이용환경개선 전기공사에 대한 현장여건 반영 및 시공물량 변경에 따른 계약금액의 변경이 발생되어 설계를 변경하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 가로변정류소 이용환경개선 전기공사

○ 공 사 비 : ￦49,597,730원 [도급비 ￦26,437,730원]

○ 계 약 자 : 덕립전기(주) 대표 김영선

○ 공사기간 : 2015. 12. 2~2016. 5. 20

○ 공사내역 : 디자인 승차대 2개소, 무장애정류소 17개소 전기관로 공사

□ 설계변경 내역

○ 공사금액 조정

구 분		공사금액	증·감	증감 사유
총공사비	당초	49,597,730	감)19,652,030	도급비, 이전비 감액
	변경	29,945,700
도 급 비	당초	26,437,730	감)1,185,730	전기 인입관로 연장축소 조정 등 감액
	변경	25,252,000
이 전 비	당초	23,160,000	감)18,466,300	관리청 복구비 납부에서 본공사 직접복구 전환
	변경	4,693,700

○ 주요변경 내용

-  도급비(계약금액) 조정내역 : 지중 및 가공선로 증가, 관경 축소 조정, 명일여고 맨홀 3개소 제외 등으로 감액발생.

-  이전비 조정내역 : 당초 전선관로 굴착구간 복구비 관리청 납부방식에서 소규모 원인자 복구방식(본공사)으로 전환되고, 폐기물 중간처리비 제외조치.

○ 시공물량 조정내역

품 명	규 격	단 위	수량		변경사유
			변경전	변경전
전원선	지중1선	m	535.0	601.0	현장여건과 도면이 상이하여 조정
전원선	가공1선	m	20.0	52.0	현장여건과 도면이 상이하여 조정
전선관 배관	PE Ø54㎜	m	353.0		관경 축소시공 54mm -> 30mm
전선관 배관	ELP Ø30㎜	m		224.0	관경 과다설계 변경시공
전주용 입상관	용융도금 반원Ø80	EA	16.0		후강전선관으로 변경
후강전선관 배관	KSC8401	m		180.8	전주용 입상관 및 노출배관 변경
암타이 밴드	밴 드	개소		16.0	전주용 입상관 변경 16EA 증가
맨홀 (사각뚜껑 포함)	600×600 ×800	EA	4.0	1.0	BIT 전원 재사용으로 2EA 감소 신동아아파트 1EA 감소
접지공사	E3,100Ω	개소		19.0	정류소 접지공사 설계누락으로 19EA 추가

□ 조치계획

○ 현장여건 변경 등으로 시공물량이 변경됨에 따라 전체공사에 대해 설계변경하여 계약금액을 감액 조정하고자 함.

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 계약자 설계변경 승인요청 문서 1부.  끝.