투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	감원인행위 요청(서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수공사 관급자재 구매)

우리부에서 시행 중인「서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수공사」에 소요되는 관급자재(레미콘) 구매계약과 관련하여 아래와 같이 감원인행위를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 수량변경 내역                                    (단위:원)

품 명	납품요구번호	기원인행위액(A)	감원인행위액(B)	변경원인행위액 (A-B)	비 고 (품의번호)
레미콘	12-15-1-64266-00	2,582,200	604,080	1,978,120	104

나. 변경사유 : 21동 외부 목재데크 기초 변경

다. 예산과목 : 사회혁신담당관, 사회문제 해결을 위한 사회혁신 의제 발굴 실행, 사회혁신 기반조성 및 성과확산, 서울혁신파크 조성사업, 시설비

	건축부장
주무관	권기용		복지시설과장	조영수		건축부장	05/13 안재혁
협조자
시행	건축부-6143	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2654	/전송	3708-2659	/	kky593@seoul.go.kr	/	대시민공개