문서번호	방재시설부-7074
결재일자	2016.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
송석범		신용우	05/13 임춘근
협조	광역도로과장		진재섭
	주무관		김상도

- 남부순환로~오정대로간 도로개설공사 -

서울시구간 조경변경사항 실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 남부순환로~오정대로간 도로개설공사 -

서울시구간 조경변경사항 실정보고사항 검토보고

『남부순환로~오정대로간 도로개설공사』중 서울시구간내 조경공사   관련하여 서울시 도시공원위원회 가로수 심의결과 및 강서구 의견사항을 공사에 반영한 검토 보고임.

※ 관련공문 : 실정보고(서울시 구간 조경 변경사항)승인요청/천호수 제2016-176호)

공사개요

○ 공 사 명 : 남부순환로~오정대로삼거리간 도로개설공사

○ 사업기간 : 2010.09.29. ~ 2016.06.30.

○ 규    모 : 도로개설 폭 8차로, 연장 1,230m

○ 도 급 비 : 10,860백만원(조경 990백만원)

○ 시 공 사 : 보훈종합건설㈜

○ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링

추진경위

○ 2016.04.01. : 제8차 도시공원위원회 소위원회 개최(푸른도시국)

- 일 시 : 2016.4.1.(금) 14:00~17:00

- 장 소 : 푸른도시국 회의실

- 안 건 : 방화대로 가로수 식재계획(신규)

- 결 과 : 조건부 가결

○ 2016.04.29. : 도시공원위원회 심의결과 통보(강서구→도기본)

○ 2016.05.02. : 도시공원위원회 심의결과 공사 반영통보(도기본→감리단)

○ 2016.05.10. : 도시공원위원회 심의결과 반영 실정보고(감리단→도기본)

감리단 실정보고 내용

공 종	당 초	변 경	증.△감	비 고
1. 수목식재공
서양측백(H2.5×W0.8)	300	300	-	적정
왕벚나무(H4.5×B15)	217	-	△217	〃
왕벚나무(H4.0×B12)	-	203	203	〃
자산홍(H0.3×W0.3)	5,500	-	△5,500	〃
흰말채나무(H1.0×W0.4)	5,500	-	△5,500	〃
사철나무(H1.0×W0.3)	-	4,450	4,450	〃
화살나무(H0.6×W0.3)	-	5,540	5,540	〃
영산홍(H0.3×W0.3)	-	4,450	4,450	〃
회양목(H0.3×W0.3)	-	5,540	5,540	〃
잔디(평떼)	457	282	△175	〃
2. 식재보조공
통기관설치(∅100×L300)	-	406	406	적정

감리단 검토 의견

○ 현  황

- 본 대상지 시점부는 행정구역상 서울시 강서구에 포함되는 구간으로          기존 방화로와 연계하여 왕벚나무 테마가로 성격을 부여하기 위해           왕벚나무 가로수로 기설계된 내용임.

- 2016.4.1. 제8차 도시공원 위원회 소위원회 심의내용 및 강서구 의견          반영으로 가로수 하부 식생의 수종 변경 및 물량의 변화가 불가피하게          발생함.

○ 심의 조치사항 및 강서구 요구사항

- 가로수 및 도로표지판, 신호등 안전시설과 이격거리 확보 후 식재

- 왕벚나무 지하고 H1.5이상 반영(왕벚나무 규격변경 B15→B12)

- 조성구간내 50~100m 간격의 이동통로 조성

- 가로수 식재시 통기관 설치

- 가로수내 하부식재는 화살나무+회양목+잔디 및 사철나무+영산홍          +잔디 패턴으로 식재토록하고 가로수 하부 근원경 주위에는 맥문동          등 야생초화류를 식재

- 관련근거: 강서구 공원녹지과-8215(2016. 04. 29)

○ 검토의견

- 서울시구간내 조경공사는 도시공원 소위원회 심의사항 반영 및 발주처와          강서구 협의된 사항에 대한 반영으로 가로수(왕벚나무) 규격 조정, 하부          녹지 반영 수종의 변경으로 봄철의 영산홍, 가을의 화살나무 단풍, 겨울에          상록 계통의 사철나무, 회양목 반영으로 사계에 걸쳐 지역 경관 창출 및           주변 환경의 질을 조절하는데 양호한 것으로 판단 됨.

- 또한 가로수의 생육환경을 개선하기 위해 빗물이나 양분, 산소의 이동          통로로서의 기능성 제고를 위하여 통기관을 설치하여 가로수 생육환경을          개선하는 것이 타당하다고 판단되며, 이번 실정보고로 인하여 증가되는           공사비는 추후 설계변경에 반영함이 타당하다고 판단됨.

개략공사비 내역

(단위 : 천원)

구 분	공사금액		증․감액	비 고
	당 초	변 경
수목식재	223,216	253,345	30,139
직접공사비	223,216	253,345	30,139
제경비	56,784	65,100	8,316
공급가액	280,000	318,450	38,455
부가세	28,000	31,850	3,845
도급 공사비	308,000	350,300	42,300

검토결과

○ 방화대로 서울시 구간 0.96km 가로수 신규식재와 관련하여 제8차         도시공원위원회 소위원회 조건부 가결사항을 유지관리부서인 강서구와        협의 후 의견에 따라 공사에 반영하여 가로녹지대 생육환경 개선 및 경관을        향상하고자 함.

○ 공사의 시급성을 감안 우선 시공토록 실정보고 사항을 승인하며            추후 설계 변경에 반영하도록 감리단에 통보하고자 함.

붙임 : 감리단 실정보고서 1부.  끝.