문서번호	시설과-3088
결재일자	2016.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	추진반장	관리부장	서울대공원장
김용주	이승우	심상원	05/13 송천헌
협 조
	동물기획과장		이종혁
	동물복지1과장		이달주

야행관 리모델링 설계용역 준공기한 연기보고

2016. 5

(기반시설안전추진반)

야행관 리모델링 설계용역 준공기한 연기보고

야행관 리모델링 설계용역 시행중 전시분야 사육시설 검토 등에 따른 설계용역 지연으로 다음과 같이 설계용역 기간을 연장하고자 함

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 야행관 리모델링 설계용역

□ 용역기간 : 2015. 6. 29 ~ 2016. 5. 13

□ 계 약 자 : ㈜방총건축사사무소 대표 이창훈

□ 계약금액 : 금84,902,616원

□ 주요용역내용

○ 건축물 리모델링 : 지상1층, 연면적 622.20㎡

○ 외부방사장 신설 : 321㎡

○ 야행관 동물 이동에 따른 호주관, 남미관 등 보수공사

Ⅱ		준공기간 연기

□ 연기일수 : 20일

□ 계약금액 : 변경없음

□ 변경내역

구 분	변 경 사 항		비 고
	당 초	변 경
용역기간	2015. 6. 29 ~ 2016. 5.13	2015. 6. 29 ~ 2016. 6. 2	20일 연장

□ 준공기한 연기사유

○ 설계업체가 검토요구한 전시분야 내·외부방사장 사육환경, 시설 검토 및 결정에 장기간 소요되어 설계지연

□ 지체상금 부과여부 : 미부과(귀책 : 서울대공원)

Ⅲ		보고자 의견

□ 위와 같이 준공기한을 연기하여 설계용역을 완료하고자 합니다.

따로붙임 : 야행관 리모델링 설계용역 계약기간 연장요청 공문 1부.