문서번호	소방행정과-5816
결재일자	2016.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
조성종	이기주	代김제현		05/16 최재천
협 조

청사 석면철거 및 천정텍스 교체공사 계획

2016. 5.

용산소방서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

청사 석면철거 및 천정텍스 교체공사 계획

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준 (고용노동부 고시 제2008- 26호, 2008.6.17.)에 의거 발암물질 지정 관련하여 청사 석면 조사결과에 따른 석면자재 철거 및 천정 텍스 교체 등 청사환경개선 추진계획 임.

□ 관련근거

○ 석면안전관리법 제22조『건축물 석면 조사결과에 따른 조치』

○ 시장방침 제35호(2010.2.3.)『석면관리 종합대책』

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 청사 석면제거 및 천정텍스 교체공사

○ 위    치 : 서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 외 3개소

○ 공사범위

- 석면철거(석면텍스, 가스켓, 밤라이트) : 본서, 이태원, 이촌, 서빙고

- 텍스교체(무석면 친환경자재 설치) : 이태원, 이촌, 서빙고

□ 석면설치 현황

○ 석면면적 : 893.55㎡

구 분		석면면적 (㎡)	석면제거 면적(㎡)	석면잔여 면적(㎡)	석면 종류	설치장소
합 계		893.55	-	893.55		지하보일러실 배관, 사무실,대기실 천정
본서	지하	0.03	-	0.03	가스캣	배관 가스캣(0.03㎡)
이태원	지하	0.01	-	0.01	가스캣	배관 가스캣(0.01㎡)
	1층~옥탑	452.8	-	452.8	백석면	천정텍스
이촌	1층~옥탑	405.7	-	405.7	백석면	천정텍스
서빙고	지하	0.01	-	0.01	가스캣	배관 가스캣(0.01㎡)
	1층~옥탑	35	-	35	백석면	천정텍스

□ 세부 추진계획

○ 청사 석면철거공사

- 공사규모 : 석면철거(968.47㎡)

▹ 사업장폐기물 배출자는 폐기물처리업의 허가를 받은 자 및 폐기물 처리 신고자에게 위탁 처리(폐기물관리법 제18조 관련)

○ 천정텍스(무석면) 설치공사

- 공사규모

▹ 천정텍스(무석면)설치 : 1,045.6㎡(석면텍스 제거 면적 893.5㎡+노후텍스 면적 152.1㎡)

▹ 경량철골 교체, 폐기물처리 등

○ 석면철거 및 교체장소

- 이태원119안전센터

석면텍스 철거 및 교체

노후텍스 철거 및 교체

- 이촌119안전센터

석면텍스 철거 및 교체

노후텍스 철거 및 교체

- 서빙고119안전센터

석면텍스 철거 및 교체

노후텍스 철거 및 교체

□ 예산집행 및 계약

○ 소요예산 : 금69,475,000원(금육천구백사십칠만오천원)

○ 계약방법 : 전자공개수의계약(G2B)

○ 예산과목 : 직무환경개선,소방관서 보수보강공사, 시설비(401-01)

○ 관련법령

- 지방자치단체를 당사지로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규 제27호,2015.10.1.)

□ 추진일정

○ 2016. 5. 16.               : 발주계획 수립

○ 2016. 5. 17. ~ 5. 24.    : 입찰공고

○ 2016. 5. 24. ~ 5. 27.    : 계약체결 및 착공

○ 2016. 5. 30. ~ 6. 28.    : 공사시행

○ 2016. 5. 28. ~ 6. 30.    : 준공검사 및 대금지급

붙 임 1. 설계도면 1부.

2. 내역서 1부.

3. 시방서 1부.

4. 석면지도 1부.

5. 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트 1부.  끝.