문서번호	설비부-7582
결재일자	2016.5.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
양우창		김창균	05/16 권오식
협조

『도심권 50+ 캠퍼스 및 복지타운 리모델링 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연기검토 보고

2016. 5.

도시기반시설본부

(설비부)

『도심권 50+ 캠퍼스 및 복지타운 리모델링 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연기검토 보고

우리본부에서 추진하고 있는『도심권 50+캠퍼스 및 복지타운 리모델링 기계설비공사』에 따른 관급자재 납품연기 검토에 대한 보고임.

1		공사개요

□  공 사 명 : 도심권 50+캠퍼스 및 복지타운 리모델링 기계설비공사

□  위    치 : 마포구 백범로 31길 21 (舊, 한국산업인력공단 별관동)

□  규    모 : 지하2층/지상10층, 연면적 10,835㎡

(냉·난방, 위생, 환기, 소방 설비)

□  공사기간 : 2015.12.28. ~ 2016.10.27.

2		납품기한 연기내용

□  대상건명 및 내용

건 명	납품요구번호	금액(원)	계약자	납품기한
				당 초	변 경
부스타펌프 구매	12-16-2-11670-00	15,318,000	(주)세고산업	‘16.05.18	‘16.09.30
전기히트펌프 구매	12-16-2-11195-00	18,026,400	삼성전자(주)	‘16.07.30	‘16.09.30
공기순환기 구매	12-16-2-11155-00	34,571,880	삼성전자(주)	‘16.05.30	‘16.09.30

□  연기사유 : 납품시기 미도래

□  귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

□  지연배상금 부과여부 : 미부과

3		조치계획

□  납품시기가 미도래한 관급자재의 납품기한을 연기하고자 함.

첨  부 : 납품기한 연기 동의서 각 1부  끝.