문서번호	급수운영과-10022
결재일자	2016.5.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	지방시설사무관대우	급수운영과장	북부수도사업소장
남현우	이승완	代이승완	05/16 박용진
협 조
	주무관		代정재필
	주무관		김종필토
	주무관		남상욱
	주무관		이준규

준공기한 연기 검토보고

【노원역 ~ 상계역간 외1개소 배급수관 정비공사 등 5건 교통소통대책 수립용역】

2016. 5.

북부수도사업소

(급수운영과)

준공기한 연기 검토보고

우리사업소에서 시행중인『노원역 ~ 상계역간외 1개소 배급수관  정비공사 등 5건 교통소통대책 수립용역』에 대한 도급자(유신엔지니어링)로부터 제출된 준공기한 연기 요청에 대한 검토 보고임

Ⅰ		용역 현황

□ 용 역 명 : 노원역 ~ 상계역간외 1개소 배급수관 정비공사	등 5건 교통소통대책 수립용역

□ 용역기간 : 2016.03.17 ~ 05.16

□ 용역개요 : D=200~600mm, L=5,895m

□ 도 급 액 : 금42,370,000원

□ 도 급 자 : 주식회사 유신 대표 성낙일

□ 용역감독 : 서울특별시 상수도사업본부 북부수도사업소

Ⅱ		보고 내용

□ 도급자 의견

○ 준공기한 연기사유 및 가능일수 : 자문회의 일정지연으로 절대용역 기간 부족(39일)

- 현공정율 : 70%

· 완료공정 : 교통소통대책 자문회의 완료

· 잔여공정 : 자문회의 결과 보완보고서 작성제출......18일 소요

소자문위원회 보완보고서 심의......21일 소요

○ 준공기한 연기 내용

- 당  초 : 2016.03.17. ~ 5.16

- 변  경 : 2016.03.17. ~ 6.24 (39일 연기)

□ 사업소 검토내용

○ 준공 연기사유 및 가능일수 : 절대용역 기간 부족 39일 ⇒ 적정

- 자문회의 결과 보완보고서 작성 제출 및 소자문위원회 보완 보고서 심의 일정으로 인한 절대용역 기간 부족으로 준공기한 연기가 불가피함.

Ⅲ		보고자 의견

□ 상기와 같은 사항으로 절대용역 기간이 부족한 실정인 바, 아래와 같이 준공기한을 연기하여 용역시행에 만전을 기하고자 합니다.

○ 준공기한 연기

- 당  초 : 2016.03.17. ~ 5.16

- 변  경 : 2016.03.17. ~ 6.24 (39일 연기)

○ 귀책사유 : 북부수도사업소

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 준공기한 연기원 1부.  끝.