문서번호	소방행정과-5294
결재일자	2016.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
허재범	유승권	조기태		05/16 서순탁
협 조

- 안전도시 기반 구축을 위한 -

백운119안전센터 내진성능평가 계획 보고

동작소방서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 안전도시 기반 구축을 위한 -

백운119안전센터 내진성능평가 계획

최근 국내 · 외 지진발생으로 건축물의 안전도에 우려가 있어 공공건축물 지진

방지대책에 따라 각종 재난·재해 상황관리를 위한 소방청사에 대한 내진성능

보강을 위한 내진성능평가 추진계획임.

Ⅰ				추 진 근 거
		c

「지진안전성 표시제 업무처리지침」 (국민안전처 2015.10.30.)

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제7조의2 제1항(내진성능평가 등)

건축법 제48조 및 동법 시행령 제32조

소방행정과-3366(2016.2.5.)호 “소방청사 공공건축물 내진성능평가 계획 알림”

Ⅱ				기 본 방 향
		c

설계도서 검토 및 안전진단 결과를 참조하여 대상 건축 내력산정

건축구조기준(KBC코드)의 지진하중에 근거하여 설계된 지진하중 산정

내진성능 미 확보된 모든 소방청사에 대한 내진성능평가 우선 실시,

결과에 따라 내진성능 설계 및 보강공사 예정

Ⅲ				내진성능 확보 현황
		c

소방청사별 현황

구분	본서	노량진	상도	백운
확보여부	확보	미확보	미확보	미확보

Ⅳ				추 진 계 획
		c

사 업 명 : 백운119안전센터 내진성능평가

추진기간 : 2016. 5월 ~ 7월

추진대상 : 백운119안전센터

청사명	주소	층수	연면적	건축년도
백운119안전센터	동작구 사당로63(상도동106)	4/1	701.75㎡	2006 (1991)

추진절차

① 예비조사 : 설계도서(구조 및 건축도면) 검토, 현장조사 및 안전진단실시

② 성능평가 : 구조안전진단실시, 내진보강대상물 선정 실시

③ 보강확인

- 내진보강 필요시 : 보강공사 추진(보수보강실시설계, 보수 보강 추진)

- 내진확인 시 : 내진성능확인서 발급

④ 내진 확인 시 지진안전성표시제 신청 : 국민안전처

⑤ 지진안전성표시제 인증서 발급 : 표시제 로고 부착

용역업체 선정

- 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제9조에 따른 「안전진단전문기관」     등록을 필한 기관 중 견적비교 후 선정(※ 사회적약자기업 우선 선정)

내진성능평가 범위

- 자료수집 및 내진성능평가 계획수립

- 설계도면 및 관련자료 분석

- 현황조사 및 관련자료 분석

- 건축물에 따른 지진거동특성 분석

- 자료정리 및 분석

- 건축물에 적합한 내진성능 평가기법 선정

- 구조해석 및 내진성능 평가

- 내진성능 향상을 위한 보수·보강방안 수립

- 최종보고서 작성 및 성과품 제출

추진일정

- 기본계획 수립 ·························································· ‘16. 5. 16 ~ 17.

- 공고 및 입찰  ································································· 5. 18 ~ 20.

- 용역계약 체결 ································································· 5. 23 ~ 24.

- 착수 및 완수  ······························································· 5. 24 ~ 7. 8.

- 대 가 지 급  ································································ 7. 9 ~ 7. 11.

Ⅴ				예 산 현 황
		c

배정예산 : 금7,700천원

예산과목 : 직무환경개선 / 소방청사 보수·보강공사 / 시설비(401-01)

계약방법 : 수의계약(전자수의시담)

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항

붙 임  지진안전성표시제업무처리 지침 1부.  끝.