함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	준공기한 연기 결정[노원역~상계역간외 1개소 배급수관 정비공사 등 5건 교통처리용역]

1. 급수운영과 – 25509(2016.12.30.)호와 관련입니다.

2. 『노원역~상계역간외 1개소 배급수관 정비공사 등 5건 교통처리용역』건에 대한 준공기한 연기사유가 발생하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 계약 현황

상 호	대 표 자	계약 금액(원)	계약 일자	당초 준공기한
*******	***	**********	**********	**********

나. 계약 변경 사항 : 준공기한

- 당    초 : 2016. 05. 16.

- 변    경 : 2016. 06. 24.

다. 연기사유 : 자문회의 일정지연으로 절대용역 기간 부족

라. 귀책사유 : 북부수도사업소

마. 지체상금 부과여부 : 미부과(지방자치단체 공사계약일반조건 제8절-1-다에 의거)

따로붙임 :  준공기한 연기 보고서 등 각1부.  끝.

주무관	한경란		행정관리팀장	조기열		행정지원과장	정의석		북부수도사업소장	05/16 박용진
협조자
시행	행정지원과-10243	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소	/
전화	3146-3245	/전송	02-3146-3279	/	sobongh@seoul.go.kr	/	부분공개(7)