함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(노원역 ~ 상계역간외 1개소 배급수관 정비공사 등 5건 교통소통대책 수립용역)

우리사업소에서 시행중인 『노원역 ~ 상계역간외 1개소 배급수관 정비공사 등 5건 교통소통대책 수립용역』의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 노원역 ~ 상계역간외 1개소 배급수관 정비공사 등 5건 교통                               소통대책 수립용역

2. 계 약 자 : ㈜유신 대표자 성낙일

3. 계약금액 : 금42,370,000원

4. 용역기간

- 당  초 : 2016.03.17. ~ 5.16

- 변  경 : 2016.03.17. ~ 6.24

5. 연기사유 귀책소재 : 북부수도사업소

6. 지체상금 부과여부 : 미부과

7. 연기사유 : 자문회의 결과 보완보고서 작성 제출 및 소자문위원회 보완 보고서 심의 일정지연으로 인한 절대용역 기간 부족으로 준공기한 연기가 불가피함.

붙 임 : 1. 준공연기 관련 서류 각1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	남현우		지방시설사무관대우	이승완		급수운영과장	전결 05/16 代이승완
협조자	주무관	한경란
시행	급수운영과-10025	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3341	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(6)