문서번호	시설관리과-9686
결재일자	2016.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
유광창		박미영	05/16 장종욱
협 조
	기전팀장			김충완
	주무관			이한수
	주무관			박상권
	주무관			정재필

2016년 유수율 향상 및 평가대비 추진계획

2016. 5.

북부수도사업소

시설관리과

2016년 유수율 향상 및 평가대비 추진계획

2016년 유수율 목표 95.29% 달성을 위하여 각 분야별 유수율  단위사업에 대한 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		추진방향

❍ 유수율 목표 95.29% 달성 및 전년 대비 유수율 향상 추진

❍ 유량감시 시스템을 통한 과학적인 공급량 관리

❍ 유수율과 관련된 각 분야별 단위사업 시행 철저

❍ 단위사업 항목별 유수율 평가 기준에 따라 추진실적 관리

❍ 유수율 향상대책 보고회의 부본부장 지시사항 이행

Ⅱ		2016년 단위사업별 추진계획

□ 심야시간 누수탐지

❍ 물사용량이 최소인 야간시간대에 하수도의 물 흐르는 소리등을

확인하여 누수여부를 집중적으로 탐지

❍ 담당 지역별 조를 편성하여 야간 2시~4시에 주기적으로 육안점검

시행 후 결과를 복명(2회/매월)

지역명	조사자	비 고
미아동,삼양동,삼각산동	박상권, 이태화
인수동,송천동	유광창, 이이남
수유1～3동	정성식, 정재필
번동,송중동	최형진, 전선표
우이동	이한수, 정재필

□ 하천변 상수도관 점검

❍ 심야시간 누수탐지와 병행하여 하천변 상수관로 주위 하수도와

퇴수변을 점검하여 누수적출 및 방지

- 맑은물이 흐르는 곳을 유의하며 확인

- 심야시간 누수탐지 복명과 병행하여 주기적 보고(2회/월)

❍ 대  상

하천명	위치	구경(mm)	연장(m)	지역담당
우이천	번동 428-38 ~ 429-47	100	330	정재필
우이천	번동 454-6 ~ 465-72	200	850	정재필
우이천	수유동 168-47 ~ 166-36	300	370	정성식
우이천	수유동 693-6 ~ 685-3	150	110	정성식
우이천	수유동 723-7 ~ 697-2	200	980	정성식
우이천	쌍문동 507-36 ~ 507-45	100	80	이한수
우이천	우이동 265-7 ~ 292-1	150	1,450	이한수
가오천	수유동 산127-4 ~ 522-34	80	110	박상권
가오천	수유동 516-6 ~ 521-36	300	85	박상권
대동천	수유동 570-30 ~ 521-36	150	450	이한수

□ 배수지 주변 하수도 조사

❍ 배수지 주변 하수관로 조사을 통해 배수되는 물의 양을 파악하여

배수지  조인트 부분등의 누수여부 확인

❍ 주변 지하수,약수터 염소 반응 측정하여 수돗물 여부 확인

대상	규모(㎥)	급수지역	지역담당	비고
수유6배수지	3,000	삼양동, 미아동, 송천동, 우이동, 인수동	박상권
우이배수지	2,000	우이동	이한수
4.19배수지	2,000	우이동, 인수동	박상권
수유5배수지	1,200	수유1동, 인수동, 우이동	박상권
번동배수지	2,000	번동, 송중동	정재필

□ 기존관 철거

❍ 2016년 배급수관정비계획에 따라 목표달성(사업소목표 6.9Km)

- 미아동 1264-111~1261-358외 10개소 배급수관정비공사

․ 공사개요 : D=80~300mm, L=1,430m

- 단절관 순환관망 정비

․ 대상 : 수유동 263-8 ~ 265-3 외 4개소

․ 정비개요 : D=80~100mm, L=230m

- 급수공사 및 누수복구공사시 발견된 노후관 정비

❍ 정비 내용

-  노후된 강관, 회주철관 등 적수 및 누수사고 많은 관 정비

-  노후관 정비시 기존관 철거율 70% 이상 준수

□ 불용관 정비

❍ 누수복구, 급수공사(페전) 및 각종 상수도공사시 발견된 불용관을

분기점에서 완전 폐쇄

❍ 불용관은 정비대상이 구체화 되어 있지 않고 불특정하게 발생되어

상수도공사시 발견되는 불용관은 누락되는 일 없이 철저히 분기점

에서 폐쇄하여 기존관 미폐쇄로 인한 신발생이 되지않도록 함

❍ 공간협소, 간선도로등 불용관정비가 어려운 사항은 별도 보고서를

작성하여 정비완료시까지 지속적으로 관리

□ 노후 인입관 정비

❍ 인입급수관(50mm 이하) 정비 : 아연도강관, PVC관

- 골목내 부설된 50mm 이하 배수관정비 포함

- 노후인입급수관(50mm 이하) 정비대상 관리대장 작성하여 정비 여부 표기

❍ 아연도강관의 누수가 발생하지 않도록 모든 아연도강관 정비

▶ 부본부장 지시사항

❍ 재개발 지역중 관리처분 단계 및 착공단계 GIS정리

- 관리처분 단계는 이주 및 철거 단계로 이주세대 분기점 폐쇄는

GIS시스템에서 이력정리

※ 골목내 사유지 및 민원인 반대로 정비 불가시 관련보고서 작성 및 관리

❍ 대 상

- 강북구 인수동 535-57외 3건

․정비개요 : D=15~50mm, L=60m

- GIS시스템상 노후관으로 표시되어 있는 위 4개소는 확인굴착후

노후 관이 확인되면 굴착승인을 득한 후 즉시 정비시행하고,

노후관이 아니 면 GIS시스템 수정

□ 유수장애 상수도관 이설

❍ 정비 방법

-  하수도 내부에 부설된 유수장애 상수도관 이설

-  하수도내 불용관은 분기점에서 철거 및 폐쇄

-  이설공간이 협소한 경우 별도 관망형성 등 정비방안 마련

-  귀책사유가 하수도인 경우 원인자 부담금 징수조치

❍ 대상

-  2016년도 우리사업소 정비대상 0건

-  추후 자치구에서 추가로 정비요청이 있을 경우 유수장애 상수도관

대상 본부 보고 및 이설 시행

- 추가 발생분에 대하여는 유수장애 시설물 관리카드 작성

□ 재개발․재건축 지역관리

❍ 관리계획수립 : 사업단계별 분야를 세분화하여 구체적 계획수립

❍ 관리실태점검

- 사업단계별 주요사항 GIS시스템 입력

․ 사업시행인가 : 기본정보, 협의/추진사항

․ 관리처분 계획인가 : 기본정보, 협의/추진사항, 순찰/점검

(분기1회), 폐전사항

․ 착공 : 기본정보 및 모든 세부추진사항(누수복구 이력 제외)

❍ 대상

지 역	미아7구역	미아9-1	월계구역	월계2구역
진행단계	이주중	이주중	이주중	이주중

□ 유량계 및 유량감시시스템 관리

❍ 유량계 관리점검 : 자체 유지관리계획수립, 점검결과 지적사항에

대한 조치관리

❍ 유량감시시스템 운영 점검

- 통신불량 및 공급량 보정, 일일 공급량 분석

- 사시설현황 자료관리, 심야시간 최소유량 분석등

❍ 대상

- 구역, 중블록 유량계 : BB-1(월계배수지)외 7개소

- 가압장, 배수지 유량계 : 미아가압장 외 29개소

□ 가압지역 유수율 편차 해소 및 정확도 개선

❍ 가압장 유수율 관리대상 및 목표(9개소)

가압(증압)명	2015년 유수율	관리 담당자	현황	목표
미아1	109.95%	박상권	과대	100%이내
미아2	129.81%	박상권	과대	100%이내
수유(증압)	102.50%	정성식	과대	100%이내
우이1	103.92%	이한수	과대	100%이내
4.19	101.26%	박상권	과대	100%이내
번동(증압)	105.47%	정재필	과대	100%이내
수유	82.78%	정성식	과소	2~5%상향
우이	88.08%	이한수	과소	2~5%상향
번동	74.45%	정재필	과소	5~7%상향

❍ 현재까지 추진현황

- 번동가(증)압 급수지역 수전현황 파악 : 8,758수전

(번동가압장 : 6,495수전, 번동증압장 : 2,263수전)

- 번동증압장 수전을 번동가압장 수계로 변경완료

- 미아동 258-732 한일아파트(D=75mm)외 141수전

❍ 향후 추진계획

- 순찰점검, 집중 누수탐지, 수전확인 작업 실시

․가압경계 도면 재 구축 및 수전확인 작업 결과 보고

- 가압수와 자연수지역 경계밸브 개․폐여부 조사

- 월 단위 공급량, 조정량 증․감원인 분석 실시

- 가압급수지역 관리자료 GIS시스템 입력(관리카드, 수전내역, 밸브현황)

□ 중블록 유수율 목표관리

❍ 현재까지 추진현황

- 월계1중블록, 월계2중블록간 경계밸브 점검

․점검현황 : 도봉구 쌍문동 423-99외 7개소

․ 점검결과 : 일부 경계밸브 개․폐 상이로 월계1,2중블록 수계 혼용          ․ 중블록내 수전변경(월계2→월계1) : 쌍문동 422-84외 6개소

- 월계1중블록, 북악4중블록간 경계밸브 점검

․ 미아동 864-31 숭인시장 앞 D=900mm 외 17개소

❍ 향후 추진계획

- 유량시스템을 통한 중블록별 일일공급량 분석

- 취약 블록별로 누수집중탐지 시행

․ 송배수관 곡관부, 3회이상 누수다발 상수도관, 지하철역주변 등

- 블록 간 경계밸브 매월 1회 이상 점검 실시

Ⅲ		행 정 사 항

□ 유수율 관련 담당자간 정기적인 회의실시

❍ 업무추진 과정에서 발생된 문제점 및 애로사항을 직원 간의 의사

소통을 통하여 해결방안 모색

□ 유수율 추진사업 실적 점검 및 관리

❍ 심야시간 누수탐지, 하천변 상수도관 점검 : 2회/월

❍ 가압지역 유수율 관리(수전변동 및 경계도면) : 1회/월

❍ 중블록 공급량 분석 등 정기적 회의 결과 보고 : 2회/월

□ 직원별 책임할당제를 실시하여 평가대비 실적관리

연번	사업명	담당자	비고
1	기존관철거	정성식
2	불용관정비	정재필
3	노후인입관 정비	박상권
4	유수장애 상수도관이설	박상권
5	재개발,재건축 지역관리	박미영
6	유량계 및 유량감시시스템관리	정희종
7	가압급수 지역관기	유광창
8	중블록 유수율 목표관리	유광창

붙임 : 단위사업별 세부매뉴얼      끝.