문서번호	버스정책과-8730
결재일자	2016.5.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	정류소관리팀장	버스정책과장
이오수	정순종	05/16 이상훈

2015년 가로변 정류소 이용환경개선 폐기물처리용역 설계변경 시행

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시교통본부

(버스정책과)

2015년 가로변정류소 이용환경개선 폐기물 처리용역 설계변경

2015년 가로변정류소 이용환경 개선공사 폐기물 처리용역에 대하여 처리물량 감소에 따른 설계를 변경하고 계약금액을 조정하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2015년 가로변정류소 이용환경 개선공사 폐기물처리용역

○ 용 역 비 : ￦8,380,000원

○ 계 약 자 : (주) 수도환경 대표 이병권

○ 용역기간 : 2015. 12. 2~2016. 5. 20

○ 용역내역 : 폐콘크리트 247톤, 폐아스콘 72톤 운반 및 처리용역

□ 설계변경 내역

○ 폐기물 처리비 조정내역

구 분		공사금액	증·감	증감 사유
폐기물 운반비	당초	2,146,430	감) 370,070	폐기물운반 물량감소 145㎥→120㎥
	변경	1,776,360
폐Con’c처리비	당초	3,952,000	감) 864,000	폐콘크리트 물량감소 247ton→193ton
	변경	3,088,000

※폐아스콘 처리비 변경 없음 (당초, 용역물량 및 수량과 동일)

○ 주요변경 내용

-  폐기물운반비 조정내역 : 당초 폐콘크리트 107㎥에서 굴착물량 축소에 따른 24㎥감소되어 최종 83㎥운반 처리됨(폐아스콘은 변경 없음).

-  폐기물처리비 조정내역 : 당초 폐콘크리트 247톤, 폐아스콘 72톤 포함 319톤 처리에서 굴착구간 축소에 따른 54톤이 감소되어 최종 265톤이 처리되었음.

○ 용역물량 조정내역

공 종 명	규 격	단 위	수량		변경사유
			변경전	변경전
폐기물 운반(33.2km)	덤프트럭 24톤	㎥	145	120	폐기물 발생량 감소에 따른 운반비 조정 (폐Con’c 25㎥감소)
폐기물 처리 (폐콘크리트+폐아스콘)	폐기물	ton	319	265	폐아스콘은 변경이 없으나, 폐콘크리트는 54톤이 감소되어 265톤 최종처리

□ 조치계획

○ 현장여건 변경 등으로 용역물량이 변경됨에 따라 전체 용역비에서 설계 변경하여 계약금액을 감액 조정하고자 함.

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 계약자 설계변경 승인요청 문서 1부.  끝.