투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	서울과학관 건립공사 계약변경(총차 및 3차 공사기간 연장) 의뢰

1. 서울과학관 건립공사 총차 및 3차공사 공기연ᄌᆞᆼ(2회) 검토 보고(건축부-1653호, 2016.05.13.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 『서울과학관 건립공사』에 대하여 아래와 같이 계약변경(총차 및 3차 공사기간 연장)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울과학관 건립공사(총차 및 3차)

나. 계 약 자 : 키움건설(주) 외2개사

다. 계약요청 내용 : 총차 및 3차 계약 공사기간 연장

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총차	계약금액	10,767,295	10,767,295	변경없음
	공사기간	‘14. 1. 13~‘16. 5.20	‘14. 1. 13~‘16. 6.19	30일 연장
3차	계약금액	4,525,895	4,525,895	변경없음
	공사기간	‘15.10.31~‘16. 5.20	‘15.10.31~‘16. 6.19	30일 연장

따로붙임  1. 서울과학관 건립공사 총차 및 3차 공사연장(2회) 검토 보고서 1부.

2. 서울과학관 건립공사(3차) 공사기간 연장요청 실정 보고 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서(총차 및 3차, 합의각서 별도송부) 1부.

4. 총차 및 3차 공사 변경 전·후 예정공정표 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김대식		환경시설과장	유현수		건축부장	05/16 안재혁
협조자	계약1팀장	김점선
시행	건축부-6202	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2648	/전송	02-3708-2659	/	kd3286@seoul.go.kr	/	부분공개(5)