함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	용역 변경계약 체결 통보 [노원역~상계역간외 1개소 배급수관 정비공사 등 5건 교통처리용역]

1. 급수운영과-10025(2016.5.16.)호와 관련입니다.

2. 『노원역~상계역간외 1개소 배급수관 정비공사 등 5건 교통처리용역』건에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하고 통보 합니다.

가. 건       명 : 노원역~상계역간외 1개소 배급수관 정비공사 등 5건 교통처리용역

나. 계약상대자 : 주식회사 유신 대표 성낙일

다. 계약 기간  : 2016.3.17. ~ 2016.5.16.

라. 계약 변경 사항 : 준공기한

- 당    초 : 2016. 5. 16.

- 변    경 : 2016. 6. 24.

마. 변경사유

- 자문회의 일정지연으로 절대용역 기간 부족

따로붙임 : 1. 공사변경계약서 1부.

2. 계약보증서 및 합의서 각 1부.  끝.

	행정지원과장
주무관	한경란		행정관리팀장	조기열		행정지원과장	05/17 정의석
협조자
시행	행정지원과-10338	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소	/
전화	3146-3245	/전송	02-3146-3279	/	sobongh@seoul.go.kr	/	부분공개(7)