문서번호	기반시설과-1731
결재일자	2016.5.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
곽영만		박일연	05/17 박상돈
협조
	주무관		조운행

- 당산동 ~ 샛강생태공원간 보행육교 설치공사 -

녹지 복구계획 변경 검토 보고

2016. 5.

한강사업본부

기반시설과

- 당산동 ~ 샛강생태공원간 보행육교 설치공사 -

녹지 복구계획 변경 검토 보고

당산동 ~ 샛강생태공원간 보행육교 설치공사가 마무리 단계에 있어 지역주민의

민원 수렴과 관리주체인 서울시시설관리공단 의견 및 현장여건의 변경에 따라 아래와 같이 녹지 복구계획을 변경하고자 함.

공사개요

○ 공 사 명 : 당산동 ~ 샛강생태공원간 보행육교 설치공사

○ 공사위치 : 영등포구 당산동 ~ 샛강생태공원 자전거도로

○ 공사규모 : 보행육교(폭 5m, 연장 139m) 승강기(20인용) 2대

녹지복구 1식

○ 공사기간 : 2015. 6. 19 ~ 2016. 5. 20

○ 시공 및 감리 : 시공 - ㈜오이코스,  감리 - ㈜한국건설관리공사

○ 소요예산 : 6,128백만원(공사 5,524.  감리 385.  전기 219)

보고내용

지역주민 민원 처리

○ 민 원 인 : 삼성래미안아파트 201호, 202호 거주 주민 ○ 내 용 : 보행육교 설치로 인한 사생활 보호를 위하여 노들길 차폐 식재 요청

현장여건에 따른 설계 변경

○ 위 치 : P1 엘리베이터 구조물 옆 ○ 내 용 : 엘리베이터 구조물 설치로 인한 녹지 훼손 ○ 대 책 : 녹지복구(영등포구와 협의)

○ 위 치 : P1 엘리베이터 구조물 하부 ○ 내 용 : 구조물 하부 복구 계획 없음 ○ 대 책 : 건조에 강한 맥문동(매트) 식재

서울시시설관리공단 요구사항

○ 노들길변 사면 복구시 기존의 원추리에 맞춰 식재요망

〈훼손구간 옆 기존 원추리〉	〈원추리 식재 대상〉

○ 수벽 및 가로수 형태의 수목 식재

· 수벽처리 : 개나리→ 화살나무 · 가로수 형태로 이팝나무 식재	〈개나리 식재 대상〉

○ 삼성래미안 아파트 주민들로부터 자동차 전용도로변 녹지공간를 수준높게

조성하여 달라는 민원이 상존하고 있어 복구시 수준높은 조경으로 조성

〈녹지 복구 대상〉	〈수목 보식 대상〉

개략 공사비(경비제외)

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경			증 액	비 고
		총 액	공 사	관급자재
금 액	27,926	119,926	87,552	31,752	92,000

검토의견

○ 노들길 녹지복원에 대하여 관리주체(영등포구청)의 의견은 수벽을 사철

나무 와 화살나무로 변경 건의사항을 반영하며,

○ 지역주민 및 올림픽도로 관리주체인 서울시시설관리공단의 요구사항이

타당하다고 판단되어 감리와 협의하여 설계변경 시행하고

○ 설계변경에 따른 증액은 국토교통부와 협의로 사업물량이 축소된 토사반출

등의 사업금액 범위내에서 추진하고자 함.

붙임 : 1. 녹지복구 계획도 1부.

2. 영등포구 협의 공문 1부. 끝.