투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(보행자전거과장)
(경유)
제목	도심권역내 자전거횡단도 설치공사 추가예산 재배정 요청

1. 보행자전거과-6306(2016.05.04)호와 관련입니다.

2. 도심권 교차로 내 자전거횡단도 설치공사와 관련하여 중구 숭례문교차로, 시청교차로 자전거도로 정비 사업에 필요한 예산을 아래와 같이 추가 재배정 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업명 : 자전거도로 유지보수(자전거횡단도 설치)

나. 예산요청 내역

장 소	시설물명	개선물량	당초배정액	변경금액	추가요청액	비 고
숭례문교차로	노면표시	2,626m	19,074천원	24,540천원	5,466천원	야간공사
	유색포장	379㎡	8,932천원	11,676천원	2,744천원	단가조정
시청교차로	노면표시	3,580m	26,004천원	34,870천원	8,866천원	야간공사
	유색포장	411㎡	9,790천원	12,798천원	3,008천원	단가조정
합 계			63,800천원	83,884천원	20,084천원

붙 임 : 자전거횡단도 설치공사 내역서 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	권세봉		도로보수과장	05/17 이규철
협조자	주무관	이상하
시행	도로보수과-4599	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8359	/전송	300-8364	/	se1212@seoul.go.kr	/	대시민공개