문서번호	토목부-9897
결재일자	2016.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
지풍근		권혁대	05/18 김영수
협조
	주무관		이정원

건설폐기물(혼합) 반영 검토보고

(용비교-행당중간 도로개설공사)

2016.5.

도시기반시설본부

(토목부)

건설폐기물(혼합) 반영 검토보고

(용비교-행당중간 도로개설공사)

용비교 PCMC포장을 위해 기존 아스팔트 포장 철거시 발생된 폐기물 중 교면방수시트 부분의 성상이 달라 건설폐기물(혼합)로 처리에 대한 검토보고임

Ⅰ		관련근거

○ 토목부-7999호(2015.4.17.)업무지시전(기존교량 포장 승인)

○ 토목부-20884호(2015.10.6.)업무지시전(건설폐기물 반영 승인)

○ PH16-용행감-047호(2016.5.3.)실정보고 승인 요청(혼합 건설폐기물 처리)

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 용비교-행당중간 도로개설공사

○ 공사위치 : 성동구 금호동 용비교 북단 ~ 행당동 행당중

○ 공사규모 : 도로확장 및 개설 B=5.2[eqn: m]L=7.2[eqn: m]

○ 공사기간 : 2007.3.22.∼ 2016.5.31.

○ 도 급 비 : 27,988백만원

○ 감 리 단 : ㈜평화엔지니어링 외 1개사

○ 시 공 사 : 한신공영(주)

○ 공 정 률 : 94%

Ⅲ		보고내용

□ 건설폐기물(혼합) 발생분 반영

○ 용비교 PCMC포장을 위해 기존 아스팔트 포장 철거시 발생되는 교면방수    시트 부분의 건설폐기물(혼합) 성상이 달라 당초 설계된 폐아스콘 및 폐콘크리트로 처리가 불가하여,

○ 기존 아스콘 포장 일부만 폐아스콘 처리하고 교면시트를 포함된 나머지는   건설폐기물(혼합)로 처리

단면도

구 분	당 초	변 경
폐기물 처리 단면도

수량 증ㆍ감 현황

공 종	단 위	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
혼합 건설폐기물	ton	-	708	708

공사비 증ㆍ감 현황

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
1.폐기물 운반비
혼합 건설폐기물	-	5,076,360	5,076,360
2.폐기물 처리비
혼합 건설폐기물	-	29,428,020	29,428,020
금액절삭	-	743	743
합 계	-	34,503,637	34,503,637
부가가치세	-	3,450,363	3,450,363
총 계	-	37,954,000	37,954,000

Ⅳ		조치계획

○ 건설폐기물은 성상별로 처리하는 것이 적정함으로 향후 설계 변경시         반영하고자 함

붙 임 : 감리단 검토 의견서 1부.  끝.