문서번호	조경과-7027
결재일자	2016.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장
조현	하재호	05/18 이원영

“2016년 에코스쿨 조성”

대상지 변경(추가) 요청 등에 대한 검토보고

2016. 5.

푸른도시국

(조 경 과)

“2016 에코스쿨 조성”

대상지 변경(추가) 요청 등에 대한 검토보고

“2016 에코스쿨 조성사업”과 관련, 강서구의 사업대상지 변경(추가) 요청이 있어 아래와 같이 검토하고 보고드림.

Ⅰ				사업개요(강서구)

대 상 지 : 염경중 등 7개교

규    모 : 4,833㎡

사업기간 : 2016. 1. ~ 12.
사 업 비 : 1,190백만원(시비 990, 국비 200)

사업내용 : 옥상녹화, 자연학습장 조성 등

Ⅱ				변경요청 개요

사업기관 : 강서구

변경사유 : 공항초 옥상녹화를 위한 하중검토 결과 허용하중 미달

변경내용

- 사업내용 변경(공항초) : 옥상녹화 → 지상부 자연학습장 조성

- 공항초 절감예산 활용하여 대상지 추가선정(등원중)

구 분	당 초	변 경		비 고
대 상 지	1개소(공항초)	2개소
		공항초	등원중
규 모	490㎡	200㎡	580㎡
사업내용	옥상녹화	자연학습장 조성	학교숲 조성
소요예산	150백만원	50백만원	100백만원

Ⅲ				검 토 결 과

공항초 사업내용 변경 : 승인

- 건물 허용하중상 옥상녹화가 어려워 지상부 자연학습장 조성으로 사업내용을 변경한 사항은 타당함.

대상지 추가 및 예산사용 요청 : 승인

- 등원중 주요 사업내용은 이용이 적은 포장 철거후 학교숲을 조성하는 사항으로 에코스쿨 조성 사업취지에 적합함.

- 공종별 단가산출 및 절감예산 활용계획 등은 적합함.

Ⅴ				행 정 사 항

검토결과 및 신규 대상지 에코스쿨 추진위원회 구성 및 설계 등 사업추진 철저 안내(시 → 강서구)

2016 에코스쿨 조성사업 추진현황 정리(시)

- 당초 : 67개교, 49,789㎡

- 변경 : 68개교, 50,079㎡

붙임 : 강서구 공원녹지과-9327(2016.5.16.)호 공문 및 관련 사업계획서 각 1부.  끝.