투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	동남권역 시민청 조성사업 건축공사 준공기한 연기 계약 의뢰(계약이행기간 연기)

1. 우리본부에서 시행중인『동남권역 시민청 조성사업 건축공사 』에 대한 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 동남권역 시민청 조성사업 건축공사

나. 계 약 자 : 우협종합건설㈜(대표 조택래)

다. 계약금액 : 729,331,880원(금칠억이천구백삼십삼만일천팔백팔십원)

라. 계약기간 : 2015.12.28. ~ 2016.05.25.

마. 변경계약 요청 내용 : 계약이행기간

구분	변경전	변경후	비고
공사기간	2015.12.28. ~ 2016.05.25.	2015.12.28. ~ 2016.10.25.	5개월 연장

바. 연장사유

1) 강남구청의 위법사항 시정 이유로 공사중단 요청에 따른 공사                        중지함

따로붙임 : 1. 공사기간 변경 방침 1부.

2. 준공기한연기 요청서 1부.

3. 합의 각서 1부  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김연석		건축관리과장	곽동호		건축부장	전결 05/19 안재혁
협조자
시행	건축부-6400	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	대시민공개